#1출입구 및 환기구 설치공사 사업비 산출 요약

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 지하철922공구 #1출입구 및 환기구 설치공사(위탁공사)

□ 시 공 사 : 대우건설(주) 외 4개사

□ 감 리 사 : 선진엔지니어링종합건축사사무소(주) 외 2개사

Ⅱ		사 업 비

□ 공사비

❍ 도서제출 : 둔촌주공 재건축조합(경원엔지니어링) - 공사기간 24개월

❍ 낙찰률 결정 및 계약 : 8,810,000천원(착공 후 24개월)

- 서울시 자문위원회 결정(2017. 9. 6) : 94.99%

※ 시공사 요구 : 100%, 조합요구 : 85.5%(수의계약 시 VAT 추가)

❍ 공법변경 및 계약추진 (2018. 10월 개통, 공기단축 9개월)

- 토    공 : H-pile+지보공 ⇒ RSW(특허공법)

- 구조물공 : R.C 구조물 ⇒ R.C + P.C 구조물

- 서울시 자문소위원회(‘17.11. 8) 및 자문본부위원회(’17.11.30) 개최

※ 공사비 확정 : 11,183,000천원(시공사 요구 12,099,000 천원)

□ 감리비

❍ 감리용역 계약(17개월) : 788,000천원

※ 건설기술용역대가의산정기준에 따른 산출(24개월) : 1,120,000천원

□ 행정경비(사업관리비)

❍ 행정경비 산출 : 114,000천원

- 조달청 수수료율 적용 : 1.022%

□  총 사업비 변경 현황( #1출입구 및 환기구 등 설치공사 사업비 )

(단위 : 백만원)

구 분		설계(둔촌주공)	당초계약	변경계약	비 고
적 용 공 법	토 류 공	H-Pile+지보공	H-Pile+지보공	R.S.W+일부복공
	구조물공	R.C	R.C	R.C+P.C
	공사기간	24개월	24개월	15개월	공기단축 : 9개월
사업비	공 사 비	9,074	8,810	11,183
	지장물처리	1,177	1,058	838
	감 리 비	미산정	1,120(설계)	788(적용)
	행정경비	미산정	114	114
	계	10,251	11,102	12,923

○ 귀 조합에서 2017년 5월 제출된 도서의 적용공법(공사기간 24개월)은 협약서에 명시한 지하철 개통기한 미준수로 지하철 9호선 3단계 개통(‘18.10월)이 불가능하였습니다.

○ 우리시에서는 특단의 대책으로 공법을 변경하고, 자문회의를 거쳐 2018년 10월 개통을 위하여 현장에서 불철주야 노력하였으며, 공법변경(공기단축 9개월) 및 야간작업 등으로 부득이 공사비 증액이 발생되었음.