사업비 납부 및 세부집행 현황

◯ 사업비 현황                                            (단위 : 백만원)

구 분	설 계 서 (둔촌주공)	사업비 계약(변경) 현황(시공사,감리)			비 고 (증감 사유)
		당초 계약 (설계서 검토)	변경 계약 (공법변경 등)	증 감
공 사 비	9,074	8,810	11,183	2,373	낙찰률적용, 공법변경 등
감 리 비	-	1,120	788	-332	당초:24개월 → 변경:17개월
사업관리비	-	114	114	-	조달수수료 적용
지장물이설비 등	1,177	1,058	838	-220	외부위원 검증위원회 검토 등
합 계	10,251	11,102	12,923	1,821

◯ 공사비 납부 현황(재건축조합)                          (단위 : 백만원)

비 고	총 사업비	납 부 금 액				잔여금액 (미납금)	비 고
		계	1차 납부 (이설비)	2차 납부	3차 납부
납부일	-		‘17.05.19	‘17.08.31	‘18.06.25
금 액	12,923	10,251	1,250	5,125.5	3,875.5	2,672

◯ 공사비 집행 현황                                     (단위 : 백만원)

비 고	납부된 사업비	집행내역				집행잔액	비 고
		합 계	1차 집행 (이설비 등)	2차 집행 (공사비,감리비)	3차집행 (공사비,감리비)
집행일	-		‘07.05∼’17.07	‘07.09∼’18.04	‘07.06∼’18.09
금 액	10,251	10,221.1	831.7	5,520.6	3,868.8	29.9