등록번호

푸른도시과-15661

주무관

공원관리팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

등록일자

2018.9.20.

지민수

김은종

양종수

09/27

이경우

결재일자

2018.9.27.

공개구분

대시민공개

협  조

기획예산과장

강환복

교통관리과장

조문익

예산팀장

김정현

주차관리팀장

代방제두

유니버설디자인 통합놀이터 조성 사업계획

서 대 문 구

푸른도시과

사전 검토 항목
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목		검토 여부 ( ■표시 )
구민참여 등 고려여부	구민	유 ■ ☞ 방법( 주민참여 워크숍 등 )		해당무 □
	협치파트너	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	이해당사자	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	전문가	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	기타	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
관계기관 및 부서협의	관계기관·단체	유 □ ☞ 기관명( )		해당무 ■
	관련부서	유 ■ ☞ 부서명( 도시공간개선단, 교통관리과 )		해당무 □
관련법령	법령규정	검토 ■ ☞ 법령명( 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 어린이놀이시설 안전관리법)		해당무 □
	공직선거법	검토 □ ☞ 저촉여부( )		해당무 ■
	조례 및 규칙	검토 □ ☞ 조례규칙명( )		해당무 ■
재원확보 및 처리절차	예산확보	구비 □ 시비 ■ 국비 □ 기타 □ ( )		해당무 □
	처리절차	투자심사 □ 용역심사 ■ 심의 □ 기타 □		해당무 □
갈등관리	해소방안	대책마련 □ 이해조정 □		해당무 ■
홍보	홍보수단	보도자료 ■ 소식지 □ SNS □ IPTV □ 기타 □ ( )		해당무 □
기타 고려사항	기타	고용효과 □ 성인지 □ 장애인 ■ 노인 ■ 아동 ■ 한부모가정 □ 안전 ■ 유지관리비용 ■ 기타 □ ( )		해당무 □
바른 우리말	행정순화어	불필요한 외국어·외래어 사용여부		검토완료 ■

유니버설디자인 통합놀이터 조성 사업계획

기 조성된 공원 내 노후 공원시설물 및 어린이놀이시설을 정비하여 누구나

이용할 수 있는 통합놀이터로 재조성하고자 함

1. 추진근거

□ 2017년 특별조정교부금 교부 알림(정책기획담당관-23511호, 2017. 12. 8.)

2. 추진방향

□ 연령, 장애 유무 관계없이 함께 이용할 수 있는 통합놀이터 조성

□ 기존의 환경(주거, 지형 등)을 고려하여 최대한 이용에 불편이 없도록 조성

3. 추진개요

□ 사 업 명 : 유니버설디자인 통합놀이터 조성사업

□ 대 상 지 : 홍박마을마당, 홍남어린이공원

홍박마을마당	홍남어린이공원
□ 위 치 : 홍은동 11-23 일대 □ 규 모 : 2,679㎡ □ 조성(정비)년도 : 2010년(2016년) □ 시설현황 ○ 조합놀이대, 흔들놀이기구 3조 ○ 농구장, 체육시설 5조, 정자 1조, 벤치 등 □ 주변현황 ○ 공원 하부에 공영주차장이 위치하며, 인근 도담도서관, 청소년문화의집이 위치	□ 위 치 : 홍은동 405-3 □ 규 모 : 971㎡ □ 조성(정비)년도 : 1979년(2009년) □ 시설현황 ○ 조합놀이대, 그네, 시소, 흔들놀이기구 5조 ○ 건강지압길, 체육시설 3조, 벤치 등 □ 주변현황 ○ 버스 종점 부근으로 교통이 원활하며, 인근 장애인 보호시설이 위치

※ 기존 대상지(실락어린이공원, 17,452㎡)는 북한산 자락에 위치한 산지형 공원으로

장애인 편의시설이 미비하고 접근성이 떨어짐 → 전문가 자문을 통해 대상지 변경

□ 사업기간 : 2018. 2. ~ 2019. 6.

□ 사업내용 : 통합놀이터 조성, 노후 공원시설물 교체 등

□ 소요예산 : 700백만원(특별교부금 – 명시이월사업)

○ 도심속공원및녹지확충·정비, 공원정비및관리, 노후어린이놀이시설교체공사, 시설비

4. 추진실적

□ 2018. 2.  6. : 현장조사 및 계획 수립

□ 2018. 2. 26. : 전문가 자문단 구성, 현장답사 및 전문가 자문회의(1차)

□ 2018. 3. 13. : 선진지 답사(어린이대공원), 전문가 자문회의(2차)

□ 2018. 4. 16. : 통합놀이터 상호이해교육, 전문가 자문회의(3차)

□ 2018. 6. 28. : 전문가 자문회의(4차) → 변경 (예정)대상지 현장답사

□ 2018. 7. 26. : 전문가 자문회의(5차) → 대상지 변경에 따른 예산 관련 협의

□ 2018. 8. 21. : 전문가 자문회의(6차) → 추가 대상지 사전검토(5개소)

□ 2018. 8. 27. : 전문가 자문회의(7차) → 추가 대상지 현장답사(3개소) 및 선정

5. 추진절차 및 계획

현황 분석 (2018. 6. ~ 9.)	→	기본 구상 과정 (2018. 9. ~ 10.)	→	설계과정 (2018. 11. ~ 12.)	→	조성공사 ( ~ 2019. 6.)
대상지 현황 및 국내외 사례조사		참여디자인워크숍을 통한 기본구상(안) 마련		도면작성용역		공원 재 조성 및 모니터링

6. 행정사항

□ 교통관리과 - 홍은1동 제4공영주차장 내 엘리베이터 설치 이후 관리이관

□ 기획예산과 – 특별조정교부금 관리

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.