문서번호	안전치수과-16377		주무관			하수계획팀장			안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2018.9.28.
			박성웅			김정선			황왕연	09/28 남궁용
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호
				주무관				황재호

도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사

현장실정보고

2018. 9.

안전치수과

도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사

현장실정보고

도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사 시행 중 현장조사 결과 실정보고 사항이 있어 아래와 같이 보고합니다

Ⅰ		사업개요

공 사 명 : 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사

공사기간 : 2018. 8. 31. ~ 2019. 4. 27.

공사규모

- 하수관 전체개량(D=300~900㎜, L=747m)

- 하수관 부분개량(D=300~1,200㎜, 322개소)

도 급 비 : 2,528,767천원

도 급 자 : 찬희건설(주) 대표 한희경

Ⅱ		실정보고 내용

구  분

위 치

보 고 내 용

개략공사비

(천원)

비고

총 계

증 210,000

부분교체

⇩

전체교체

보라매공원

관로번호 20-31244

부분교체구간 전체구간으로 변경 정비

- CCTV 조사결과 전체구간에서 균열로 인한 파손, 이음부 결함, 뿌리침입 등이 발견되어 전체구간 개량으로 변경 시행

구 분	변경내용
당초	관로번호 20-31244(D800㎜, L=177m) 부분교체 7개소, 17.5m
변경	관로번호 20-31244, -31243, -31242 (D800㎜, L=215m), 전체교체 215m

증95,000

구  분

위 치

현      황

개략공사비

(천원)

비고

부분교체

⇩

전체교체

상도1동 720-2

관로번호 20-03214

부분교체구간 전체구간으로 변경 정비

- CCTV 조사결과 전체구간 PE관으로 이음부 이탈 및 결함, 관파손등으로 전체구간 개량으로 변경 시행

구 분	변경내용
당초	관로번호 20-03214(D450㎜, L=27m) 부분교체 1개소, 2.5m
변경	관로번호 20-31214(D450㎜, L=27m) 전체교체 27m

증 23,000

부분교체

⇩

전체교체

노량진동 148-56

관로번호 20-11208

부분교체구간 전체구간으로 변경 정비

- CCTV 조사결과 전체구간에서 이음부 이격 및 파손, 연결관 돌출, 표면손상 등으로 전체구간 개량으로 변경 시행

구 분	변경내용
당초	관로번호 20-11208(D450㎜, L=31m) 부분교체 1개소, 2.5m
변경	관로번호 20-11208(D450㎜, L=32m) 전체교체 32m

증 13,000

부분교체

⇩

전체교체

대방동 17-40

관로번호 20-09428외1

부분교체구간 전체구간으로 변경 정비

- CCTV 조사결과 전체구간에서 이음부 이탈 및 파손, 관파손 등으로 전체구간 개량으로 변경 시행

구 분	변경내용
당초	관로번호 20-09428, -09350 (D800㎜,L=182m),부분교체 5개소, 12.5m
변경	관로번호 20-09428, -09350 (D800㎜, L=182m), 전체교체 182m

증 79,000

Ⅲ		조치계획

원활한 공사 추진을 위하여 보고내용과 같이 우선 시공하고, 추가 공사비(210,000천원)는 추후 계약금액 조정시 이설비 및 낙찰차액 등을 활용하여 예산 범위내에서 정산 시행코자 함

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.