	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	항동지구 가설사무실 이전 설치 검토

항동지구 근린공원1 내 설치되어 사용 중인 단지조성공사 가설사무실을 서울푸른수목원 공원관리사무소 설치 계획(서울푸른수목원 요청)에 따른 이전설치에 대하여 다음과 같이 검토 보고합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 서울항동 공공주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2015.10.27. ~ 2018.11.03.

○ 도 급 사 : 새천년종합건설㈜ 외 1개사

○ 도 급 액 : 25,010 백만원

나. 관련근거

○ 2015.10.27. : 단지조성공사 착공

○ 2016.02.10. : 단지조성공사 가설사무실 설치 완료

○ 2017.10.20. : 단지조경 설계 완료(도시설계부→도시조경부)

○ 2017.11.03. : 단지조경공사 착공

○ 2018.05.09. : 항동 공공주택지구 공원 및 녹지 내 지장물 철거 요청(도시조경부)

○ 2018.09.12. : 역곡천 임시호안 보호공사 외 7건 검토보고(항동관리2018-209호)

- 가설사무실 이전 설치 실정보고

다. 검토내용

○ 도시조경부(서울푸른수목원) 요청사항인 근린공원1 내 서울푸른수목원 공원관리사무소 설치 계획에 따라 단지조성공사 가설사무실을 조속히 업무시설용지3으로 이전하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 가설사무실 설계현황

구 분	당 초	변 경	증감	비 고
사용기간	36개월	45개월	증 9개월
연 면 적	724㎡	620㎡	감 104㎡
형 식	가설판넬	가설판넬
층 수	1층 2개동	1층 1개동, 2층 1개동
설치부지	근린공원1	업무3부지

○ 단가 검토

- 신규공종 : 협의율 적용[100+75.46]/2=87.73%]

※ 계약심사부-2759호(2018.09.14.)로 기술심사 완료(별도의견없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

공종	규격	수량	단위	단가	금액	비고
가설사무실	가설판넬(9개월)	1	식	67,605,023	67,605,023
부대공사	포장 등	1	식	10,659,510	11,659,510
직접공사비 계				78,264,533	79,264,533
제 경 비					21,035,467
도 급 액					100,300,000	부가세포함
폐기물처리비					5,337,000	직접공사비
관급자재대					5,254,000	부가세포함
총 공사비					110,891,000

라. 조치계획

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경시 정산 ․ 반영.

붙임  1. 8.가설사무실이전설치(내역서)_9개월

2. 8.검토의견서(가설사무실 이전설치) - 9개월_최종

3. 부의안 및 설명서

4. 의결안.  끝.

부 원						도시조성부장				도시조성부장			도시공간사업본부장		09/21
		설재훈						박영욱			박영욱			김소겸
협조자
일 상 감 사	감사실장		김영준				감사일자 :	2018/09/20		감사일련번호: No.	896		감사의견여부 :	의견없음

시행			도시조성부-4789				(2018.09.21)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7641			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개