의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도사업부-9256
결재일자	2018.10.2.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),총무부장

★주무관		신교통1과장	도시철도사업부장	도시철도국장	도시기반시설본부장	결재
왕태현		위성환	박동룡	박상돈	10/02 한제현
협 조
	주무관				원길묵
	신교통2과장				성원배
	주무관				신익현

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1717번, 윤호중 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

윤호중 의원(국토교통위원회, 더불어민주당, 경기 구리시)

요구번호 : 1717번

3) 별내선(8호선 연장)사업 진행현황

- 서울시 구간 공사 지연 및 예산불용/이월 발생 사유

- 향후 계획된 공사 착공을 위한 방안

□ 별내선(8호선연장) 사업 진행현황을 아래와 같이 제출합니다.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시철도사업부)	담당사무관 담당사무관	위성환 성원배
	☎ 772-7186 ☎ 772-7151	주무관 주무관	왕태현 김동일
	작 성 일 : 2018. 10. 2

별내선(8호선연장)사업 현황

□ 사업개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 ～ 구리시 토평동(서울시 : 2개 공구 시행)

○ 규     모 : 연장 3.72㎞, 정거장 1개소, 모란차량기지내 유치선(7편성)

○ 총공사비 : 5,163억원 (기투자 115억, ´18년도 958억, 장래 4,090억)

○ 공사기간 : ‘17. 8. ~ ‘23. 9.

<전체 사업개요>

￭ 위치 및 규모 : 강동구 암사동 ~ 남양주시 별내동 (연장 12.91㎞, 정거장 6개소)

￭ 총사업비 : 1조 2,762억원 (서울시 5,163억 / 경기도 7,599억)

공 구 명	서울시 시행		경기도 시행
	1공구(기타)	2공구(기타)	3공구(턴키)	4공구(턴키)	5공구(기타)	6공구(턴키)
공사기간	´17.8.23~ ´23.8.21	´17.9.30~ ´23.9.28	´16.6.8~ ´21.12.8	´16.7.18~ ´21.11.23	´16.10.4~ ´22.2.4	´16.6.7 ~´21.10.14
공정률(%)	6.4	9.2	22.9	29.4	37.0	37.1

□ 공사 추진현황 [공정율 : 7.8% / 계획 7.9% (대비 98.7%), ‘18. 10. 1 기준]

○ 별내 1공구 [공정율 : 6.4% / 계획 6.5%]

- 가시설 공사(파일 천공, 복공판 설치, 차수그라우팅) 및 저촉 지장물(한전, 통신, 도시   가스 등) 이설공사 정상 추진 중

○ 별내 2공구 [공정율 : 9.2% / 계획 9.4%]

- 한강하저 터널용 수직구(#1,#2) 구간 부지조성 및 가시설 공사 정상 추진 중,

쉴드TBM 제작 중 (공정률 56%)

□ 서울시 구간 공사 착수가 경기도 보다 늦은 사유

○ 경기도 구간(3공구~6공구, 9.1km)은 턴키공사로 발주하여 설계와 시공이 병행되는 우선착공(Fast Track)됨에 따라 설계기간을 단축하였으나,

○ 서울시 구간(1공구~2공구, 3.8km)은 기타공사로 발주하여 기본설계 및 실시설계를 단계별로 추진하고 별도 공사발주에 따른 행정절차 이행 등으로 공사 착수가 늦어짐

□ 예산불용/이월 발생 사유

○ 신속한 공사추진을 위해 ‘17년, ‘18년 사업비를 다소 많이 편성하여(‘18년말 목표공정율 20.4%) 예산의 이월이 발생함.

- ‘18년 예산현액은 총 958억원으로 ‘18년 말까지 410억원 집행하고 548억원은 이월 예정

○ ‘17.8월 공사착수 후 사전행정절차(개발제한구역행위허가, 교통심의, 문화재조사, 지장물 이설협의 등)이행완료 후 ‘18.2월부터 본격 공사 시행하여 정상 추진 중

□ 향후 계획된 공사 착공을 위한 방안

○ 사업주관기관인 경기도와 공정추진 협업을 통해 ‘23.9월 적기 공사완료토록 최선을 다하겠음.