건설공사 공기연장으로 인한 추가비용 청구 관련 분쟁 현황(제출 양식)
(2018.9월30일 기준 현재 진행 중이거나 2015년 1월 이후 완결된 분쟁 대상)
연번	공사명	발주처	시공사	계약 금액	당초계약기간 (개월)	최종계약기간 (개월)	공기연장 사유	청구 금액	조정(또는 중재) 절차 경료 여부	소송 진행 현황(또는 결과)	결과 금액 (조정 또는 판결 금액)	비고
1	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(1공구)	서울주택도시공사	금호산업(주)	114,538,170,000	38	82	설계변경	6,355,987,000	조정미시행	1심 진행중	-
2	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)	서울주택도시공사	진흥기업(주) 외 1개사	122,528,000,000	34	107	설계변경	11,583,000,000	조정미시행	1심 진행중	-
3	마곡 1,2빗물펌프장조성공사	서울주택도시공사	고려개발(주)	46,495,182,000	36	46	설계변경	328,704,852	조정미시행	1심판결 (2018년6월27일)	1심판결 : 332,017,131
4	동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사	서울주택도시공사	㈜엠지엘, 대보건설(주)	46,758,000,000	24	101	공사중지 및 설계변경	4,069,714,000	조정미시행	1차 재판 진행중	-	감정 신청 검토
5	문정지구 도시개발사업 단지조성공사	서울주택도시공사	영진종합건설(주), 이본건설(주)	22,424,000,000	36	69	설계변경	992,930,000	조정미시행	1차 재판 진행중	-	감정중

작성자	연번 1~3번	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
		서울주택도시공사(마곡사업부)	담당부장	김 영 배
		☎3410-7692	담 당 자	백 용 철
		작 성 일 : 2018. 10.02

작성자	연번 4~5번	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
		서울주택도시공사(기반시설부)	담당부장	노 병 철
		☎3410-7662	담 당 자	권 오 종
		작 성 일 : 2018. 10.02