의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-17308
결재일자	2018.10.10.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	총무부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
박태혁		이동훈	김영수	10/10 이택근
협 조
	주무관				오열상
	주무관				안상혁

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 140번, 김진수 의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

따로붙임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

김진수 의원(도시안전건설위원회, 자유한국당)

140. 월드컵대교 공사 관련

1) 현황

2) 추진실적

3) 차수별 설계변경 내역(변경항목 별 표로 작성) 및 변경 상세사유

4) 서울 서부지역 교통체증과 관련한 계획

□ 월드컵대교 건설공사

1) 현  황

○ 위    치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동

○ 규    모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○ 공사기간 : 2010.3.22.~2020.8.31.

○ 총사업비 : 2,589억원(‘18년 500억원)

(단위 : 백만원)

총 계	기투자	‘18년	‘19년 이후	비 고
258,858	138,720	50,000	70,138

2) 추진실적

○ ‘10.03. : 공사착공

○ ‘13.02. : 수상구간 우물통 시공 완료

○ ‘15.02. : 수상구간 교각(15기) 시공 완료

○ ‘16.12. : 사장교 주탑 주두부 시공 완료

○ ‘17.12. : 북단연결로(4개소), 사장교 주탑 및 거더부 시공

○ ‘18.10.(현재) : 사장교 주탑 및 거더부 시공중

- 수상구간 강교 가설 완료(682m), 케이블 가설(14/22개), 주탑부 시공(95/100m), 측경간 PSC 거더부(25/33Seg)

3) 차수별 설계변경 내역(변경항목 별 표로 작성) 및 변경 상세사유

(단위 : 백만원)

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금액	증감액
1차 (‘11.06.01)	164,006	증 5,510	-물가변동(1회) 발생 : 3.08%(4,538백만원) -강교조립장 접안시설 보강외 6건(972백만원)
2차 (‘11.12.29)	170,391	증 6,385	-물가변동(2회) 발생 : 3.77%(5,034백만원) -주탑 우물통 물량내역 오류분 변경외 10건(1,351백만원)
3차 (‘12.12.28.)	171,022	증 631	-북단 R-B,C 수목이식외 6건
4차 (‘13.12.31.)	176,063	증 5,041	-물가변동(3회) 발생 : 3.84%(5,414백만원) -우물통기초 암정산외 14건(감373백만원)
5차 (‘14.12.24.)	176,826	증 763	-수방대비 계류시설 반영외 12건
6차 (‘15.08.20.)	176,766	감 60	-북단 매립폐기물 처리방법 변경외 11건
7차 (‘15.12.24.)	177,008	증 242	-주경간구간 준설토 사토변경외 12건
8차 (‘16.12.21)	179,839	증 2,831	-사장교 주탑 균열 제어대책 외 29건
9차 (‘17.10.31)	184,956	증 5,117	-물가변동(4회) 발생 : 3.31%(3,485백만원) -북단IC 조경복구 외 15건(1,632백만원)
10차 (‘17.12.21)	191,524	증 6,568	-물가변동(5회) 발생 : 3.46%(3,637백만원) -로드아웃장 변경 외 8건(2,931백만원)

4) 서울 서부지역 교통체증과 관련한 계획

○ 서부지역에 집중적으로 추진되는 대규모 개발(상암신도시·인천 국제공항 등)에 따른 교통량 증가에 대비하여 서부지역 교통 현황, 교통수요예측 및 영향분석, 관련계획 및 교통시설 사업계획 검토, 인접 주요도로와의 연결에 따른 교통 수요 등의 분석, 교통 전문가 자문을 반영하여 노선을 계획하였음.

○ 이를 토대로 북단IC는 내부순환로 등의 운행차량이 강변북로를 통해 서부지역으로 접근이 용이토록 연결로를 계획하였고, 남단IC는 서부지역 주요 간선도로인 공항로, 올림픽대로와 직접 접속토록 계획하여 교통효율성을 극대화 하였음.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	이동훈
	☎ 3708-2542	담당자	오열상
	작 성 일 : 2018. 10.

이곳에 본문을 입력하세요