준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명: 우이동 교통광장 공영주차장 확충 공사

나. 계약업체: ㈜이공 대표 구건회

다. 계약금액: 금 팔억사천오백이십팔만구천원 (금 845,289,000)

라. 계약년월일: 2018. 04. 16.

마. 착수년월일: 2018. 04. 19.

바. 준공기한: 2018. 10. 18.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 12. 31.

나. 연기사유 귀책소재 : 강북구

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유:

- 당초 토공구간은 토사(80%)로 설계되었으나 실제 시공시 대부분 암으로 (연아,경암)토공작업이 공정계획보다 늦어짐

- 공사구간 내 복개구조물 동공발생으로 관련부서 협의 및 구조안전진단 용역 시행 및 서울시 「동고동락」에 따른 주차장 복층화 검토에 따른 잦은 설계도면 재작성 등

2018.   10.

주차관리과장   서  성  한  (인)

강북구 (분임)재무관 귀하