문서번호	교통행정과-53463		주무관			주차장사업팀장			교통행정과장	안전건설교통국장
결재일자	2018.10.11.
			강정훈			신정은			유재문	10/11 남궁용
공개여부	부분공개(5)
방침번호
			협조
방침번호
				예산팀장				김혜란

- 2018 그린파킹 담장허물기 공사 -

공사비 낙찰차액 사용계획 보고

공사개요

공사명 : 2018년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)

규  모 : 담장허물기 25개소 30면

도급자 : 보훈종합건설(주) 대표 송계점

기  간 : ′18. 3. 22. ~ 12. 31.

보고내용

현재 공정율 76%(기성지출), 작업지시 및 공사중(24%)

추가 담장허물기 신청 주택에 대하여는 낙찰차액 등(33,954천원) 활용하여

공사시행

안전건설교통국

(교통행정과)

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	□	법 령				■		방 침				□	별도규정 없음
	2018년 담장허물기사업 추진계획 [교통행정과-5216, 2018.2.1.]
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
일상감사 사항	□ ▪		대상							■	비대상					경영감사팀 협 조 ( )
			대상업무 : 계약 □, 민간위탁 □, 주요시책 □, 이․전용 □
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( ○ )
	(국 , 시 , 구 )
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

- 2018 그린파킹 담장허물기 공사 -

공사비 낙찰차액 사용계획 보고

이면도로 주차난 해소 및 주택가 생활환경 개선을 위해 시행중인「2018년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)」와 관련 금년 하반기 담장허물기 신청 주택에 대하여 낙찰차액 및 심사절감액 등 활용하여 공사를 추진 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2018년 그린파킹 담장허물기공사(연간단가)

규    모 : 담장허물기 25개소 30면

기    간 : ′18. 3. 22. ~ 12. 31.

도 급 비 : 137,077천원

도 급 자 : 보훈종합건설(주) 대표 송계점

Ⅱ		추진사항

′18.  3. 22. : 공사착공

′18.  4.  6 ~ 7. 31. : 공사시행(1~6차 작업 완료)

′18.  9.  3. : 7차 작업지시

Ⅲ		예산집행 현황

공사명	시공사	공사기간	도급액	지출액	잔액	비고
2018년 그린파킹 담장허물기공사 (연간단가)	보훈종합건설(주)	2018.3.22~ 12.31	137,077	104,760	32,000	76% 지출

⇒ 10월 현재 계약금액 100%[기성 지출(76%), 7차작업(24%)] 진행중으로 금년 하반기(7차 작업지시 이후) 담장허물기 신청 주택에  대한 공사시행을 위하여는 추가 공사비가 필요한 실정임.

Ⅳ		사업비 확보방안

예산 집행현황 및 활용가능예산

(단위:원)

구분	예산	계약심사	계약금액	활용가능예산 (낙찰차액 등)	비 고
계	225,000,000	174,523,970	171,897,400	33,954,760
공사비	164,817,000	156,971,000	137,077,900	27,739,100
폐기물처리 및 운반비	17,552,970	17,552,970	15,819,500	1,733,470
관급자재	19,147,840
무인자가방범설치	19,250,000		19,000,000	250,000
이설비	4,232,190			4,232,190

금년 하반기 담장허물기 신청 주택에 대한 공사시행을 위하여 추가되는 공사비는 낙찰차액 등 예산(33,954천원)을 활용코자 함.

Ⅴ		조치계획

금년 하반기(7차 작업지시 이후) 신청된 담장허물기 신청 주택에 대하여 낙찰차액 등 예산을 활용하여 계약금액 조정(설계변경) 후 도급업체에 작업지시하여 공사시행 하고자 함.  끝.