문서번호	조경과-5666
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
★주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이옥하	강인호	심상원		10/12 송천헌
협 조
	전략기획실장		유연호
	총무과장		이행용
	시설과장		오임석
	동물복지2과장		송부용

유-스트림 2단계 공사 현안사항 검토 보고

2018.10.

서울대공원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서울대공원 가로숲길 유-스트림 2단계 공사」

현안사항 검토 보고

「유-스트림 공사」 감독업무 수행 중 원장 지시사항 및 현장여건 변화에 따른 현안사항을 시공사에서 실정 보고하였기에 이를 검토 보고 함

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 가로숲길 유-스트림 2단계 공사

○ 위     치 : 코끼리열차길 주변(관리사무소 앞, 어린이동물원), 기린나라 앞 쉼터

○ 공사내용 : 녹지대 및 쉼터 조성(식재공사, 포장공사, 시설물공사 등)

○ 공사기간 : 2018.7.16. ~ 2018.10.13.

○ 공 사 비 : ******************************************

○ 시 공 사 : ************

2		현안사항 (실정보고내용)

1) 원장 지시사항 반영

폭염 등 기후변화에 따른 대응 차원에서 충분한 그늘을 제공하고 고온을 낮출 수 있게 녹지대 확대 ⇒ 쾌적한 공원 환경 조성

① 어린이동물원구간(2구간) 띠녹지 폭 확대 및 보도 폭 축소

당초)녹지폭 2m(실 녹지폭 1.7m), 보도폭 6m → 변경)녹지폭 2.8m(실 녹지폭 2.5m), 보도폭 5.2m

- 녹지대 및 토공량 증가, 포장 면적 및 관급자재 수량 감소

******************

② 테마가든 외곽 띠녹지 연장 설치(추가 공사분)

- 녹지폭 2.5m, 연장 300m

- 왕벚나무 등 식재, 토공 및 경계석 설치 등

- 시민 안전을 위해 보행안전도우미 추가 배치, 폐기물 처리량 증가

********************

<테마가든 외곽 띠녹지 추가 예정지>

2) 동물원 요청에 따른 추가 식재

- 양몰이 공연장 주변 차폐식재 보강 요청에 따라 쥐똥나무 추가 식재(1500주)

*******************

3) 현장 여건 변화에 따른 변경

① 식재수량 조정

- 기존 수목의 뿌리 발달 및 과도한 그늘지역 등 수목 식재가 곤란하거나 생육이 어려울 것으로 예상되는 지역에는 식재 조정 : 왕벚나무, 덩굴장미, 억새, 조릿대 등의 식재 수량 감

*******************

② 원활한 배수를 위해 도로 빗물받이 추가(6개소)

- 코끼리열차길 주변 빗물받이(4개소), 기존 트렌치 철거 후 빗물받이 설치(1개소)

- 기린나라 건너편 보도의 원활한 배수를 위해 빗물받이 설치(1개소)

******************

<코끼리열차길 및 기존 트렌치 주변 빗물받이 예정지>

<기린나라 건너편 빗물받이 예정지>

4) 준공기한 연장

○ 연장사유 : 추가 공사 시행과 여름철 폭염 및 태풍 등으로 절대공기 부족

○ 연장기간 : 당초)2018.10.13. → 변경)2018.11.30.

2. 물량 및 사업비 변경 검토

연번	공종명	규격 및 내용	수 량		공사비(천원) (증·감)
			당초	변경
	합 계				*********
1-①	띠녹지 폭 확대 및 보도 폭 축소	1식	1	1	*********
1-②	테마가든 외곽 띠녹지 연장 설치	1식(토공,경계석,식재 등)	-	1	********
		폐기물 처리 1식	-	1	*********
2	차폐식재 추가	쥐똥나무	-	1,500주	********
3-①	식재수량 조정	1식	1	1	********
3-②	빗물받이 설치	6개	-	6	********

3		검토 및 회신내용

(단위: 천원)

연번	실 정 보 고 내 용	검 토 및 회 신 내 용	공사비 (증·감)
	합 계		*********
1-①	띠녹지 폭 확대 및 보도 폭 축소	폭염 등에 대비하여 쾌적한 공원 환경을 조성하기 위해 반영	*********
1-②	테마가든 외곽 띠녹지 연장 설치	폭염 등에 대비하여 쾌적한 공원 환경을 조성하기 위해 반영	********
		폐기물 추가 발생량 적법 처리 위해 반영
2	차폐식재 추가	동물원 요구사항으로 차폐식재 반영	********
3-①	식재수량 조정	현장여건 고려하여 반영	********
3-②	빗물받이 추가	쾌적한 공원 환경 조성을 위해 반영	********

4		예산 확보 방안 및 조치의견

○ 예산 확보 방안 ⇒ 본 공사 집행잔액(배정잔액 및 낙찰차액) 활용

******************

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리, 시설비

○ 조치의견 : 검토 결과를 시공사에 회신하고 설계변경 시행

- 공정상 긴급을 요하는 일부 공정은 선 시공 후 설계변경 시행 조치

- 추가 공사 등에 따른 공사기간 및 폐기물 처리 용역 기간 연장

(당초 2018.10.13 ⇒ 변경 2018.11.30)

- 기타 : 시민 불편이 없도록 안전 조치 강화.