투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	유-스트림 2단계 폐기물 처리 용역 준공기한 연기 의뢰

1. 조경과-5666(2018.10.12.)호와 관련입니다.

2. 「유-스트림 2단계 폐기물 처리 용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울대공원 유-스트림 폐기물 처리 용역

나. 도급금액 : *************

다. 용역기간 : 2018. 7.16. ~ 2018.10.13.

라. 계약업체 : **************

마. 준공기한 연기내용 : 당초) 2018.10.13.  ⇒  변경) 2018.11.30.

바. 연기사유 : ********************************

사. 귀책소재 : 서울대공원

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  1) 방침서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	조경과장
주무관	이옥하		조경과장	10/12 강인호
협조자	주무관	정한성
시행	조경과-5669	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	500-7530	/전송	500-7993	/	okhalee@seoul.go.kr	/	부분공개(7)