의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-17524
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	총무부장

주무관		도시고속도로과장	토목부장	시설국장		결재
백종임		명경출	김영수	10/15 이택근
협 조

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 134번, 김진수 의원,도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

따로붙임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

김진수 의원(도시안전건설위원회, 자유한국당)

134. 광복교~안양교 도로확장공사

1) 사업방침서

2) 사업추진현황(연차별 예산계획 포함)

3) 준공예정일 변경 사유(구체적으로 적시)

‘안전총괄본부 도로계획과“ 소관으로 도로계획과의 협조를 얻어 제출합니다.

▢ 광복교~안양교 도로확장공사 관련

1) 사업 방침서: 붙임 참조

2) 사업추진 현황

○ 사업개요

- 위    치: 구로구 개봉동 198-32~구로동 693-2

- 규    모: 도로확장 폭 4~5차로→6차로, 연장 1,110m
(안양교 L=275m, 광복교 L=67m, 주변도로확장 L=768m)

- 사업기간: 2006. ~ 2019. 9. 30.

- 총사업비: 83,284백만원

○ 추진현황

- ´06.06.~´07.11.: 기본설계 시행

- ´07.04.          : 안양교 정밀안전진단

- ´07.12.~´09.02.: 안양교 실시설계 시행

- ´12.05.~´15.02.: 실시설계 보완용역 시행

- ´15.09.23.      : 투자심사(적정)

- ´16.03.31.      : 실시계획 및 지형도면 고시

- ´16.04.          : 시설공사 및 감리용역 착수

- ´16.08.          : 안양천 하천점용허가(서울지방국토관리청)

- ´17.03.          : 오류IC방향 가교 교통전환

- ´17.04.          : 안양교(구로IC방향) 철거

- ´17.04.~12.    : 광복교 하부공(교대,교각) 및 상부 슬래브 완료

- ´18.04.          : 안양교(구로IC방향) 하부공 완료

- ´18.05.          : 아치구간 거더 거치, 케이블 설치, 강교 및 PF빔 거더 가설

- ´18.10.(현재)    : 안양교(구로IC방향) 상부공 시행 중

○ 연차별 투자계획(도시개발특별회계)

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	83,284	4,700	4,000	10,000	16,760	47,824
설계비	1,900	1,900	0	0	0	0
보상비	325	-	0	136	0	189
공사비	74,995	2,800	3,500	9,100	15,990	43,605
감리비	6,064	0	500	764	770	4,030

3) 준공예정일 변경 사유 : 준공예정일 변경 없음.

첨부 : 사업방침서 1부.  끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	안전총괄본부 (도로계획과)	담당사무관	유 재 필
	☎ 2133-8080	주무관	정 유 빈
	작 성 일 : 2018 10. 11.

이곳에 본문을 입력하세요