등록번호

자치행정과-18602

★주무관

마을공동체지원팀장

자치행정과장

주민자치국장

부구청장

구청장

등록일자

2018.10.15.

김재희

박용기

고석민

오문식

이충열

10/15

代이충열

결재일자

2018.10.15.

공개구분

비공개(5)

협  조

재무과장

김홍

계약팀장

박우동

U-안전관리팀장

김정택

홍제활력발전소 신축공사 발주 계획

서 대 문 구

자치행정과

사전 검토 항목
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목		검토 여부 ( ■표시 )
구민참여 등 고려여부	구민	유 ■ ☞ 방법(설문조사를 통한 의견수렴 )		해당무 □
	협치파트너	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	이해당사자	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
	전문가	유 ■ ☞ 방법(매월 1회 홍제권역 TF팀 회의)		해당무 □
	기타	유 □ ☞ 방법( )		해당무 ■
관계기관 및 부서협의	관계기관·단체	유 ■ ☞ 기관명( 한국장애인개발원 )		해당무 ■
	관련부서	유 ■☞ 부서명(지역건강과, 교통행정과,전산정보과,건축과, 환경과, 지적과, 교통지도과, 사회복지과, )		해당무 □
관련법령	법령규정	검토 ■ ☞ 법령명(산업안전보건법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조 )		해당무 □
	공직선거법	검토 □ ☞ 저촉여부( )		해당무 ■
	조례 및 규칙	검토 □ ☞ 조례규칙명( )		해당무 ■
재원확보 및 처리절차	예산확보	구비 ■ 시비 □ 국비 ■ 기타 □ ( )		해당무 □
	처리절차	투자심사 □ 용역심사 ■ 심의 □ 기타 □		해당무 □
갈등관리	해소방안	대책마련 □ 이해조정 □		해당무 ■
홍보	홍보수단	보도자료 □ 소식지 □ SNS □ IPTV □ 기타 □ ( )		해당무 ■
기타 고려사항	기타	고용효과 ■ 성인지 □ 장애인 ■ 노인 ■ 아동 □ 한부모가정 □ 안전 ■ 유지관리비용 □ 기타 □ ( )		해당무 ■
바른 우리말	행정순화어	불필요한 외국어·외래어 사용여부		검토완료■

홍제활력발전소 신축공사 발주 계획

홍제활력발전소 신축을 위한 설계가 마무리됨에 따라, 공사를 발주하여 홍제권역 주민 커뮤니티 활성화에 기여하고자 함.

Ⅰ		건 립 개 요

❚ 위    치 : 홍제동 294-84. 홍은동 217-27 일대(하천부지)

※ 견인차량보관소 內 현재 자전거보관소 위치

❚ 규    모 : 1층

- 건축연면적 : 320㎡(97평)

- 대지면적 : 약 330㎡(자전거보관소+홍제견인차량보관소 주차장 일부)

- 공간설계 : 주민 커뮤니티 및 건강공동체 프로그램 공간, 가상현실

체험공간, 상담실, 사무공간, 자전거보관소(구획설치)

Ⅱ		추 진 경 과

❚ 2015. 4. : 도시활력증진 지역개발사업 공모 신청

❚ 2015.10. : 도시활력증진 지역개발사업 신규사업 선정

❚ 2016.10.~ 2017.12. : 「홍제권 도시활력증진사업 기본계획수립용역」 발주 및 준공

❚ 2017. 1.~ 2018. 8. : 홍제역세권 TF회의 개최(월1회)

❚ 2018. 4. : 홍제활력발전소 조성관련 주민설명회 및 주민설문조사 실시

❚ 2018. 6. : 설계용역 발주

❚ 2018. 7. : 구조검토 및 안전진단 실시

❚ 2018. 8. : 관련부서(9개부서) 협의 추진

❚ 2018. 9. : 석면조사 실시, 기존 태양광설비 분리, 서울시 따릉이 및 자전거

보관소 內 자전거 회수, 설계용역 준공

❚ 2018. 10. : 일상감사 등 사전절차

Ⅲ		예산 세부내역

❚ 예산액 : 649,490천원(국비 314,000천원, 구비 335,490천원)

- 2017년 명시이월 : 408,870천원(국비 162,000천원, 구비 246,870천원)

- 2018년 : 국비 152,000천원

- 2018년 : 구비(추경) 88,620천원

❚ 사업비 내역

- 설계 및 구조진단 용역 : 36,310천원

- 철거공사 및 폐기물처리용역 : 24,040천원

- 시설비(공사) : 565,140천원

- 자산취득비 : 24,000천원

Ⅳ		공사발주계획

❚ 총공사비 : 562,901천원

구 분	계	도급비	관급비	이설비	계약방법
건축·기계공사	448,307,000	417,762,000	30,545,000	0	제한경쟁입찰
전기공사	46,683,000	40,997,000	4,025,000	1,661,000	수의계약(여성기업)
소방공사	11,759,000	11,759,000	0	0	수의계약
통신공사	56,152,000	12,969,000	43,183,000	0	수의계약
합 계	562,901,000	483,487,000	77,753,000	1,661,000	-

※ 감리용역 : 건축·기계공사 적용공사비 및 기준 기본요율에 따라 감리비 산정

❚ 발주시기 : 2018. 10월중

Ⅴ		향후 추진계획

❚ 2018년 10월 : 철거공사 착공, 건축·기계공사 발주 및 입찰계약 추진,

건축·기계/전기/소방/통신공사 계약체결, 측량실시

❚ 2018년 12월 : 사인물 제작·설치, 보안경비시스템 설치

❚ 2019년  1월 : 홍제활력발전소 공간지기 모집 및 채용

❚ 2019년  2월 : 기존 태양광판넬 및 설비 재설치

※ 관련근거 : 환경과-31232(2018.9.20.)호

❚ 2019년  3월 : 홍제활력발전소 개관식 개최.

붙임 1. 조감도 1부.

2. 설계보고서 1부.

3. 설계준공 납품내역 각 1부(별첨).  끝.