문서번호	시설보수과-7948
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤동원		10/16 박병연
협조	주무관		강연홍
	주무관		김승진

예비준공검사 실시계획

(오목지하차도외2개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

예비준공검사 실시계획

(오목지하차도외 2개소 보수공사)

2018년 예산사업으로 시행중인 『오목지하차도 외 2개소 보수공사』에 대한 예비준공검사를 실시하여 미흡한 부분에 대하여 사전에 조치를 완료함으로써 공사의 품질관리에 만전을 기하고자 함

관련근거

○ 예비준공검사 개선대책(기술심사담당관-10127(2018.6.29.)

- 검사대상 : 감독권한대행 등 건설사업관리시행공사

- 안전관리계획 수립 대상 공사(시특법상 1·2종 시설물 등)

- 주 체 자 : 발주청 및 책임감리원 → 발주청으로 변경

- 시행시기 : 준공 2개월전

공사개요

○ 공 사 명 : 오목지하차도외 2개소 보수공사

○ 시 공 사 : ㈜금성아트 대표 장윤현

○ 공사기간 : 2018.05.09. ~ 2018.11.04.

○ 도 급 액 : 731,676,000원

○ 주요공종 : 아스콘포장 134a, 교면방수 1,572㎡, 신축이음 248m,

콘크리트표면보수 1,098㎡, 개방형중앙분리대 309m

○ 추진공정 : 90%

예비준공검사 실시계획

○ 검사일자 : 2018. 10. 18(목)

○ 검 사 자 : 시설보수과 시설6급 강연홍

시설7급 김승진

서울시설공단 감독 박준혁

○ 검사내용 : 공사내용에 대한 전반적인 사항

행정사항

○ 예비준공검사 실시후 조서작성 (붙임 1)

○ 검사결과 지적사항에 대하여는 시공사에 통보하여 보완조치

붙임 : 예비준공검사조서 1부.   끝.