투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(장안교(신교) 등 8개 도로시설물 정밀점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『장안교(신교) 등 8개 도로시설물 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 장안교(신교) 등 8개 도로시설물 정밀점검용역

나. 용 역 사 : (재)한국재난연구원       대표  윤영조

미승씨앤에스검사(주)     대표  김  승

다. 용역기간 : 2018. 03. 30. ~ 2018. 10. 25.

라. 계약금액 : 금147,770,000원

마. 설계변경사유 : 자문위원 감소에 따른 비용 감액(6명→4명)

바. 설계변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비		147,770,000	147,470,000	감 300,000
도급비	공급가액	133,518,182	133,518,182	-
	부가가치세	13,351,818	13,351,818	-
	자 문 비	900,000	600,000	감 300,000
	계	147,770,000	147,470,000	감 300,000

사. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단,

시설비및부대비, 시설비 --------------------147,470,000원

붙임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 합의각서 1부.  끝.

주무관	이경수		시설보수과장	代최태석		성동도로사업소장	10/16 신상식
협조자	주무관	정용재		주무관	이현은		관리단속과장	代오환섭
시행	시설보수과-3447	(		)	접수		(		)
우	04807	서울시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1562	/	leesoo@seoul.go.kr	/	대시민공개