보 고 서
			담당	팀장	총무처장	경영전략본부장
문서번호	총무처-30749
보존기간	준영구		협 조	차장
결재일자	2018.07.24.
공개여부	공개
제목	공사현장 실정 및 설계변경보고서(청사 뜨라레 확장공사)

Ⅰ	공사개요

가. 공 사 명 : 청사 뜨라레 확장공사

나. 공사기간 : 2018. 05. 21 ~ 2018. 07. 26

다. 계 약 자 : 주식회사 비퍼플인테리어

라. 계약금액 : 금38,386,570원(금삼천팔백삼십팔만육천오백칠십원)

마. 공사개요 : 청사 지하1층 휴게공간 조성 및 연결계단 설치

Ⅱ	설계변경 내용

가. 설계변경 보고내용

□ 상기 공사의 시공중 현장 여건에 따른 변경사항(물량변동) 검토 보고

◯ 현장여건으로 인한 물량감소

- 지하1층 유리벽 존치하여 유리벽철거 및 폐기물처리 물량감소(16㎡)

- 붙박이 TV 설치로 인해 기존 철재간판(갈바틀), 사인물(아크릴스카시) 미시공

- 1층 카운터 설치 부위 설비공사 실 시공물량에 따른 변경(16m → 5m)

◯ 현장여건으로 인한 설계변경

- 천장석고보드 철거 시 경량철골천장틀 파손 우려로 인해 기존 2겹 존치하고 마감용 석고보드              1겹 추가 설치

- 목공사(붙박이의자, 간접등박스, 루버 등 설치) 신규공종 발생

- 목공사로 인한 목재마감재 수성페인트 도장 후 방염페인트 도장 신규공종 발생

- 철재계단제작 시 안전성 강화를 위한 구조용 형강 및 각관 추가 설치

※ 기존 : 철판으로 하중지지 → 변경 : 철판 하부 형강 및 각관 보강

나. 순공사비 증감내역

구 분	설계변경 내용	순 공 사 비(원)
		당 초	변 경	증 감
1. 수장공사	▸ 석고보드 천장부위 2겹 설치 → 1겹 설치 ▸ 일부 벽체 루버붙임으로 마감 ▸ 붙박이의자, 간접조명박스 설치 등 으로 인한 목공사 신규공종 발생 ▸ 인테리어표면마감재 물량 증가(의자하부, 벽체면)	4,177,081	5,769,100	(증)1,592,019
2. 금속공사	▸ 자동문 설치에 따른 강화유리문, 스텐프레임 설치 등 물량변동 ▸ 철재계단 안전성 보강 위한 구조용 형강,각관 보강	10,491,362	8,429,337	(감)2,062,025
3. 타일공사	▸ 기존 러버타일 5T를 바탕용 장판, 러버타일4T로 변경	2,956,742	2,172,838	(감)783,904
4. 유리공사	▸ 지하1층 유리벽 존치하여 철거 및 신설물량 감소	909,694	166,682	(감)743,012
5. 도장공사	▸ 기존 벽체 수성페인트칠 물량 감소 ▸ 목재마감부위 방염페인트칠 물량 증가	1,968,965	1,308,264	(감)660,701
6. 기타공사	▸ 아크릴스카시 미시공에 따른 물량 감소	877,560	0	(감)877,560
7. 설비공사	▸ 작업카운터 가구 및 설비 위치 조정으로 인한 배관 길이 조정, 감소	670,352	175,613	(감)494,739

다. 총도급액 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 액	38,386,570	31,944,000	(감) 6,442,570
공급가액	34,896,882	29,040,000	(감) 5,856,882
부가가치세	3,489,688	2,904,000	(감) 585,688

Ⅲ	행정사항

상기 내용에 따라 설계변경을 시행하고 보험료 등 정산대상 제경비는 준공 시 사용유무에 따라 정산

붙	임 : 시공사 실정보고서 및 설계변경내역서 각 1부.