투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	반포천유역 분리터널 건설공사 책임건설사업 관리기술자 김대연귀하
(경유)
제목	“반포천유역 분리터널 건설공사” 지장수목 이식제거 실정보고 승인통보

1. 반포사관 제18-080(2018.10.05.)호와 관련입니다.

2. “반포천유역 분리터널 건설공사” 시행중 공사구간에 저촉되는 가로수에 대하여  서초구청과 협의 사항을 공사에 반영한 실정보고 사항에 대하여 승인 통보합니다.

3. 책임건설사업 관리기술자는 수목 운반비를 실제 운반거리로 정산하여 설계변경에 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 실정보고사항 검토보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	10/30 이임섭
협조자
시행	방재시설부-13781	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/		/	부분공개(5)