문서번호	도로보수과-9923
결재일자	2018.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
이종호		代정회곤	11/01 김용제
협조

-2018년 포장도로 긴급복구공사- 작업지시(제7차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

강서도로사업소

도 로 보 수 과

- 2018년 포장도로 긴급 복구공사 -

작업지시(제7차) 계획 보고

우리 사업소에서 관리하는 시도상 버스정류장 소성변형 및 도로소파(예상) 발생 구간에 대하여 긴급 복구 공사 업체에 작업지시하여 보수․정비하고자 함

□ 사업개요

❍ 공 사 명: 2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

❍ 공사규모: 절삭후 덧씌우기 259.7a, 소파포장 80.85a, 동공작업 등

❍ 공사기간: 2018. 3. 9. ~ 12. 14.

❍ 공 사 비: 2,903백만원(도급비 2,149,  관급비 483,  이전비 271백만원)

❍ 도 급 자: 초인산업개발(주) 김귀용

□ 작업지시

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
1	개화동로 (공항지하차도옆 부도로), 2차로	김포공항	3.3	23.5	77.6	인력	야간	4	T=10cm
2	방화대로 47길 9 (강서공업고등학교 앞 횡단보도)	강서공고앞교차로	16.2	8.2	132.8	기계 (5a)	야간	6	T=5cm
3	화곡로 95(강서양천교육지원청 입구 교차로), 3차로	강서 경찰서	6.3	24.0	151.2	기계 (5a)	야간	6	T=5cm
4	강서로 52 (까치산역 1번출구 앞 마을버스승강장), 3차로	화곡터널	3.1	24.0	74.4	인력	야간	6	T=10cm
5	공항대로 (공항초등학교 버스정류장 앞 횡단보도), 버스전용차로	송정역	4.1	12.0	49.2	인력	야간	4	T=10cm
6	공항대로 (목동517 목동도심소공원 앞), 2차로	신목동역	4.6	19.5	89.7	인력	야간	4	T=5cm

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
7	중앙로12길 12 (센츄리아파트 앞 버스승강장), 3차로	신정 네거리역	3.1	23.7	73.5	인력	야간	6	T=10cm
8	목동동로 105 (양천구청 앞 버스승강장), 4차로	목동 중학교	3.1	23.6	73.2	인력	야간	4	T=10cm
9	당산로 239 (당산빌딩 앞)	당산역 교차로	6.2	13.5	83.7	인력	야간	4	T=10cm
10	영중로 154 (당산푸르지오 앞 버스승강장), 3차로	당산 중학교	3.0	25.3	75.9	인력	야간	6	T=10cm
11	경인로 869-1 (죠스떡볶이 앞), 4차로	영등포역	4.2	18.6	78.1	인력	야간	8	T=10cm
12-1	여의나루로 42 (T월드 앞 버스승강장), 4차로(외측)	국회 의사당	6.4	66.0	422.4	기계 (10a)	야간	8	T=5cm
12-2	여의나루로 42 (T월드 앞 버스승강장), 4차로(내측)	국회 의사당	3.2	54.0	172.8	기계 (10a)	야간	8	T=10cm
13	여의대로 14 (여의도웨딩컨벤션 앞), 1~3차로	마포대교	6.0	37.4	224.4	기계 (5a)	야간	4	T=5cm
14	영등포로 59-2 (웰빙하우스 앞 버스승강장), 3차로	오목교	3.8	19.4	73.7	인력	야간	6	T=10cm
15	오리로 1335-10 (서서울생활 과학고등학교 앞 버스승강장)	오류 고가차도	2.9	27.0	78.3	인력	야간	4	T=10cm
16	경인로 382 (한마을아파트 앞 버스승강장), 버스전용차로	고척 스카이돔	4.0	18.0	72.0	인력	야간	4	T=10cm
17-1	경인로 430 (동양미래대학교 앞 버스승강장), 버스전용차로	고척교	3.3	22.8	75.2	기계 (5a)	야간	4	T=10cm
17-2	경인로 445 (동양미래대학교 앞 버스승강장), 버스전용차로	개봉 사거리	3.3	65.3	215.5	기계 (5a)	야간	4	T=10cm
18	남부순환로 (구로동693-2 구일우성아파트 앞 버스승강장), 3차로	광복교	3.2	25.5	81.6	인력	야간	6	T=10cm
19	개봉로 20길60 (복고다방 앞 버스승강장), 4차로	광복교	4.4	18.2	80.1	인력	야간	4	T=10cm
20	남부순환로97길 20-9 (행복한치과기공소 앞 마을버스승강장), 3차로	오류IC	3.6	33.5	120.6	기계 (5a)	야간	4	T=10cm
21	구로동로 29 (편의점사랑 앞 버스승강장), 2차로	디지털 오거리	3.3	22.4	73.9	인력	야간	4	T=10cm

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
22	구로동로 14 (고려한의원 앞 버스승강장), 2차로	남구로역	3.4	23.0	78.2	인력	야간	4	T=10cm
23	오리로 (오류고가차도 하부도로)	동부제강입구교차로	3.2	104.5	334.4	기계 (5a)	야간	6	T=5cm
24	구로중앙로 237 (라이프종합공구상가 앞)	구로역	3.7	58.8	217.6	기계 (5a)	야간	6	T=5cm
25	구로중앙로 (라이프종합공구상가 월편)	서부간선도로	3.7	24.3	89.9	인력	야간	4	T=5cm
26	도림천로 (신정교 → 신도림역 방향 우회전접합부)	신도림역	4.2	17.2	72.2	인력	야간	4	T=10cm
27	경인로 (고척교 버스전용차로)	구로역	3.1	28.7	89.0	인력	야간	8	T=10cm
28	목동서로 (목동청소년수련관 앞), 3차로	오목교역			4h	인력	야간	4	긴급
29	국회대로76가길11 (초원아파트 앞), 2차로	서강대교			2h	인력	야간	4	탐사
30	의사당대로 1 (의원회관앞교차로), 3차로	영등포 경찰서			2h	인력	야간	8	탐사
31	목동중앙로 45 (페리카나 치킨 앞), 3차로	목동3-4단지교차로			2h	인력	야간	8	탐사
32	여의도동 45-21 (여의도자이주상복합 501동 앞), 1차로	샛강역			2h	인력	야간	8	탐사
33	남부순환로 105길42 (가리봉의원 앞)	구로IC			2h	인력	주간	6	탐사
34	가마산로 (한일유앤아이 앞 교차로)	광명대교			2h	인력	주간	6	탐사
35	공원로 34 (한스타워 앞)	신도림지하차도			2h	인력	주간	4	탐사
36	목동서로 100 (목동신시가지아파트 310동 앞)	신목동역			2h	인력	주간	4	탐사
37	목동중앙로 57 (신동아파밀리에아파트 앞)	목동3-4단지교차로			2h	인력		4	탐사
38	디지털로 212 (T-월드 앞)	가산 초등학교			2h	인력		4	탐사

연번	위 치	방 향	지시물량			작업방법	작업조건	차로	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
39	디지털로 212 (T-월드 앞)	가산 초등학교			2h	인력	야간	4	탐사
40	경인로 노선 코아채취 (야간)				8공	인력	야간	4	노후
소계				257	881

□ 작업기간

❍ 2018.11.02. ~ 11.30.

□ 소요예산

❍ 284,110천원(시공물량에 따라 추후 정산)

□ 조치계획

❍ 위 사항을『2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』업체로 하여금 보수․정비토록 작업지시하고, 실측물량에 의거 추후 설계변경하여 반영 조치하고자 함.

붙임 1. 위치도 및 현황사진  1부.

2. 작업지시 내역서(7차)  1부.  끝.