			★ ◎
문서번호	노원센터-12291		팀 원	관리운영부장	노원센터장	북부주거복지단장
보존기간	10년								전결	11/01
신장하	김배완	이숭종	조범주
결재일자	2018.11.01
공개여부	비공개(5)		협조
일상감사	대상
통제	없음					일상 감사	No.	1018	감사	의견
신성욱				2018/11/01	백경희	의견없음
공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사 설계변경(안)
	서울주택도시공사
( 북부주거복지단 노원센터 )

공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사 설계변경(안)

우리센터에서 시행한 “공릉1단지 외 5개단지 옥상방수 공사”의 시행 중 월계사슴1단지 옥상방수공사의 실질공사 물량이 증가하여 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

계약부-10324호(2018.07.13.)『계약체결통보(공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사)』

업무18-10-01-1(2018.10.01.)『공사 설계변경에 대하여』(태복건설(주))

Ⅱ		공사개요

공사 현항

공사명	계약업체	계약기간	계약금액(원)	비고
공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사	태복건설(주)	2018.07.16. ~ 2018.11.12.	282,455,310

Ⅲ		설계변경 현황 및 사유

설계변경 현황	변경(사유)
공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사 설계변경	○ 월계사슴1개 단지의 옥상방수공사의 계약물량 산출대비 실공사 물량이 증가 - 설계시 물량산출 누락에 따른 실제 수량 반영코자 설계변경

Ⅳ		설계변경 관련현황

변경내용 현황(물량 : 사슴1단지)

연번	품명	단위	변경전	변경후	증감
1	우레탄도막방수 바닥 (노출,바탕처리,프라이머 포함)	㎡	873.20	1799.00	925.80
2	건설폐기물 수집운반	TON	10.34	20.88	10.55
3	건설폐기물처리(폐우레탄)	TON	4.05	7.93	3.88
4	건설폐기물처리(폐콘크리트)	TON	6.29	12.95	6.67
5	복합방수층 철거(도막방수면적)	㎡	1648.83	2574.63	925.80
6	기존 모르타르 철거(도막방수면적*30%)	㎡	494.65	772.39	277.74

설계변경 금액 및 예산

공사명	변경전	증․감	변경후	예산
공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사	282,455,310	증)44,810,832	327,618,860	임대,임대,수선,아파트(특별수선충당기금)

Ⅴ		행정 사항

상기건에 대하여 설계변경 후 계약부 계약변경 의뢰

붙임  1. 설계변경내역서(공릉1단지 외5개 단지 옥상방수공사)

2. 월계사슴1단지 도면.  끝.