설 계 변 경 사 유 서

1. 공사현황

□ 공 사 명 : 2018년 관내포장도로 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2018. 3. 12. ~ 2018. 12. 31.

□ 공 사 비 : 금1,562,848,080원

(도급비 1,205,616,260원, 관급비 355,731,820원, 이설비 1,500,000원)

□ 공사개요 : ASP포장 142@, CON’C포장 28@, 측구정비 1,274m 기타 1식

□ 도 급 자 : 주식회사 가빛 대표 송나영

2. 설계변경사유

□ 작업지시에 의한 물량 변경 및 관급자재 물량 증감

○ 작업지시 4차[토목과-9887호(2018.7.12)]

- 연희동201-21번지 주변 도로정비공사구간에 도로정비 반대민원 발생으로 도로정비 취소

□ 주민 도로정비 요구구간 중 정비가 시급한 구간 추가 정비물량 발생

○ 도로정비 요청구간

- 연희동523-16번지 주변(폭 2~3m, 연장 20m) : 보도블록 포장

- 연희동413~45번지 일대(폭 4.5m, 연장 140m) : 평삭후 아스콘포장

- 통일로370~통일로26길7 일대(폭 5m, 연장 50m) : 평삭후 아스콘포장

- 북가좌동377-8번지 일대(폭 3m, 연장 25m) : 아스콘포장

- 홍은동 403-7번지 일대(폭 4.5m, 연장 40m) : 평삭후 아스콘포장

- 연희로 32길 대림아파트 주변 도로(폭 3.3m, 연장 40m) : 아스콘포장

- 북아현로11길 8번지 앞 외 9개소 소규모 및 긴급포장 복구

○ 관급자재 물량 증감 및 단가변경

- 아스팔트콘크리트 단가 변경에 따른 금액 증가

- 도로정비 추가에 따른 아스팔트콘크리트 수량 증가

- 자연석경계석 및 레미콘, 시멘트, 스틸그레이팅 수량 감소

□ 공사금액 변동

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총 공 사 비		금1,562,848,080원	금1,562,848,080원	증) 113,495,920
도 급 비	공급가액	금1,096,014,782원	금1,199,196,600원	증) 103,181,818
	부 가 세	금109,601,478원	금119,919,660원	증) 10,318,182
	계	금1,205,616,260원	금1,319,116,260원	증) 113,500,000
관 급 비		금355,731,820원	금355,727,740원	감) 4,080
이 설 비		금1,500,000원	금1,500,000원	감) 0

□ 주요공종 물량 변동

공 종	규격	물량 변동		증 감	비고
		당초	변경
아스콘표층	인력	90@	110@	증) 20@
소규모포장복구	인력,소파	15@	25@	증) 10@
소규모포장복구	CA-1	5@	7@	증) 2@
노면파쇄	바브켓	54@	70@	증) 16@

□ 관급자재물량 변경

공 종	규격	물량 변동		증 감	비고
		당 초	변 경
자연석 경계석	미끄럼방지가공	297개	148개	감) 149개
	150×150×1000,모따기	1143개	1000개	감) 143개
	200×250×1000,직선	250개	100개	감) 150개
시멘트	보통포틀랜트,40kg	11,480포	10,480포	감) 1,000포
아스콘	표층(상차도)	720톤	840톤	증) 120톤
레미콘	25-21-8	144㎥	100㎥	감) 44㎥
그레이팅	500×395×50×7×4	105개	60개	감) 45개
	500×410×55×5	95개	60개	감) 35개