내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰(용도지역 재정비 용역)

우리 부서에서 시행 중에 있는「도시관리계획(용도지역) 재정비 용역(장기2차)」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 도시관리계획(용도지역) 재정비 용역(장기2차)

나. 계 약 자 : (재)서울연구원

다. 계약금액 : 금 이억오천팔백칠십이만칠천원(￦258,727,000)

라. 변경계약 내용 : 계약금액 변경없이 내역변경 및 준공기한 연기

- 당초 : 2018.1.1. ~ 2018.11.21

- 변경 : 2018.1.1. ~ 2019.2.28

마. 변경계약 사유

- 본 용역의 수행 과정에서 정부의 부동산대책(9.21)에 따른 우리시의 후속 정책추진(조례개정) 검토 지원 등 추가과업 이행으로 불가피하게 일정이 지연되어 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	도시계획과장
주무관	장영준		지역계획팀장	전기현		도시계획과장	11/12 양용택
협조자
시행	도시계획과-16185	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8327	/전송	02-2133-0736	/		/	대시민공개