				★ ◎
문서번호	노원센터-12821			팀 원			관리운영부장				노원센터장			북부주거복지단장
보존기간	10년													전결			11/13
				신장하			김배완				이숭종			조범주
결재일자	2018.11.13
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상아님
[공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사]
준공정산 보고
		서울주택도시공사
(북부주거복지단 노원센터)

준 공 정 산 보 고

우리센터에서 시행한 “공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사”에 대하여 법정경비 실비정산 및 기타 제잡비의 감액조정으로 인하여 아래와 같이 준공시 정산을 하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

〇준공정산 관련근거

정산대상	관련근거	비고
산업안전 보건관리비	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2018-72호)제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.
퇴직공제부금비	건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령(대통령령 제27751호. 2017.1.1.) 제9조(공제부금 납부확인서의 제출 등)의 ②항
실비정산, 보험료의 사후정산 등	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제39호,시행 2018.7.23.) 제1장.입찰 및 계약집행기준 제7절.실비정산, 8절.보험료 사후정산 등

계약명	계약자	(최초)계약금액(원)	(최초)계약일	착공일	비고
		(변경)계약금액(원)	(변경)계약일	준공일
공릉1단지 외 5개단지 옥상방수공사	태복건설(주)	282,455,310	2018.07.13	2018.07.16
		327,266,142	2018.11.09	2018.11.12

Ⅱ		계약현황

Ⅲ		준공정산사유

〇 법정경비 실비정산 및 기타 제잡비 정산

Ⅳ		준공(정산)내역

〇 준공(정산)금액

계약금액	준공금액	증감금액	예산과목
327,266,142	312,180,000	감)15,086,142	임대.임대.수선.아파트 (특별수선충당기금)

〇 준공(정산)세부내역

구분		계약금액	준공(지출)금액	정산금액	비고
재료비계		113,962,995	113,962,995
노무비(직접+간접)계		110,921,262	110,921,262
경비	경비	5,689,236	5,689,236
	산재보험료	4,492,311	4,492,311
	고용보험료	965,015	965,015
	안전관리비	6,811,566	2,831,900	감)3,979,666	미사용내역 정산
	퇴직공제부금비	2,364,401		감)2,364,401	공제부금 납부확인서 미제출에의한 정산
	국민건강보험	1,884,742		감)1,884,742	납부확인서 미제출에 의한 보험료의 정산
	노인장기요양보험	139,094		감)139,094	납부확인서 미제출에 의한 보험료의 정산
	국민연금	2,760,594		감)2,760,594	납부확인서 미제출에 의한 보험료의 정산
	건설기계대여급 지급보증서 발급수수료	244,698		감)244,698	장비임대료 확인서 미제출에 의한 실비정산
	기타경비	12,368,634	12,368,634
	경비소계	37,720,291	26,347,096	감)11,373,195	경비소계 분
일반관리비		12,342,411	11,807,870	감)534,541	제잡비율 정산
이윤		22,567,721	20,760,780	감)1,806,941	제잡비율 정산
원가(합계)		297,514,677	283,800,000	감)13,714,677	합계 분
부가세		29,751,465	28,380,000	감)1,371,465
총계		327,266,142	312,180,000	감)15,086,142	총계 분

Ⅴ		행정사항

〇 상기 정산내역에 따라 정산하여 준공처리하고자 함

〇 준공검사(예정)일 : 2018.11.14.~11.15.

〇 준공검사자의 지정

-관련근거 : 건설공사 집행규정 시행내규(2018.08.23.)제34조(검사자의 임명)

2.시설물 보수ㆍ보완공사 및 기타

나.준공검사

4)도급액 1억원 이상 : 담당부장 1명과 3급 또는 4급 1명

〇 준공검사 완료 후 준공검사조서 작성 및 제출(계약부)

붙임  1. 준공(정산)내역서(공릉1단지 외5개 단지 옥상방수공사)

2. 합의서.  끝.