문서번호	교육지원과-11926		주무관		독서진흥팀장		교육지원과장		행정국장
			강민아		김희순		김건회		11/15 고재식
결재일자	2018.11.15.
공개여부	부분공개(5)
			협 조

광진정보도서관 문화동 카페 확장공사 계획

행정국

(교육지원과)

사전 검토항목

☞ 해당항목에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시면 됩니다.

해당항목이 없을 경우에는‘■ 해당 없음’표시하기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명 : 도서관법 )	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 ■ 시비 □ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비예산
주민의견반영 및참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 아동참여 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
사회적 약자배려		□ 아동영향(18세미만) □ 여성 □ 장애인 □ 노인 □ 한부모 가정 등 □ 기타( )	■ 해당 없음
협업 협치	타기관	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	□ 협업 필요(해당부서 : )	■ 해당 없음
추진절차		□ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 타당성 검토 □ 심의 □ 기타	■ 해당 없음
홍보방안		□ 보도자료 제공 □ 구 소식지 □ 기자 설명회 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 지방자치 저해요인 □ 일자리창출 효과 □ 안전대책 □ 바른 우리말(행정순화어)

광진정보도서관 문화동 카페 확장공사 계획

광진정보도서관 문화동 앞 1층 야외카페를 확장(유리벽체 설치)하여  카페이용자들에게 좀 더 쾌적한 이용환경을 제공하고자 함

1		추진배경 및 현황

□ 추진배경

○ 광진정보도서관 야외카페 특성상 무더운 여름철 및 추운 겨울철에       취약하여 이용자들의 불편 야기

○ 도서관 인근에 신규카페가 다수 개업하여 도서관 카페 경쟁력 제고 및       카페운영자 운영난 해소 필요

□현장사진

□카페 확장공사 예시

2		세부추진계획

□ 사업명 : 광진정보도서관 문화동 카페 확장공사

□ 사업기간 : 2018. 11월 ~ 12월

□ 사업위치 : 광진정보도서관 문화동 앞 1층 카페

□ 사업규모 : 공사면적 33㎡(약10평)

○ 확장 전 17㎡(약5평) → 확장 후 약50㎡(약15평)

□ 추진내용

○ 광진정보도서관 카페 확장공사 설계 용역 실시

○ 카페 확장공사 실시 및 냉난방기 설치

○ 카페 내 테이블, 의자 등 집기 구매 등

□ 추진절차

설계용역		일상감사 및 계약심사(감사담당관)		업체선정(교육지원과)

계약체결(재무과)		공사시행		집기구매(교육지원과)

□ 계약방법 : 여성기업 수의계약

○ 관련근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」                  제25조 1항 5호 가목 및 동법 제30조 제1항 제2호

○ 관련 공사 경험이 많은 전문업체 선정 및 의뢰

3		추 진 일 정

□ 2018. 11. 19. ~ 11. 22. ------- 설계용역

□ 2018. 11. 23. ~ 11. 28. ------- 일상감사 및 계약심사

□ 2018. 11. 29. ~ 12. 14. -------- 공사 시공 및 준공, 물품구입

4		소 요 예 산

□ 소요예산 : 금70,000천원(2018. 특별교부세)

예산과목	금액(천원)	내역
합계	70,000
교육지원과/주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원/도서관 운영사업 및 독서문화 활성화/광진정보도서관 시설개선 사업/ 시설비및부대비/시설비	60,000	○ 설계용역 5,000천원 ○ 공사비 55,000천원
교육지원과/주민자기개발 및 평생학습 촉진 지원/도서관 운영사업 및 독서문화 활성화/광진정보도서관 시설개선 사업/ 자산취득비/자산및물품취득비	10,000	○ 카페 집기 구입 - 테이블, 의자 등 ○ 냉난방기 구입

5		기 대 효 과

□ 여름 및 겨울철에 좀더 쾌적한 환경 제공으로 이용자 만족도 증대

□ 유리테라스 조성 및 한강조망으로 타 카페와의 경쟁력 제고

6		행 정 사 항

□ 공사에 따른 이용 관련 안내 사전공지 철저

□ 공사시간 안전사고 예방을 위한 관리감독 철저