문서번호	시설과-3735
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	05/29 함석주
협조

국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역

준공기한 연기 검토 보고

2014. 4.

국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역

준공기한 연기 검토 보고

국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 설계용역 중 국립의료원의 추진일정 조정 요청에 따라 준공기한을 연장하고자 검토보고 드림.

□ 용 역 개 요

용 역 명 : 국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역

용역기간 : 2014. 3. 12. ~ 2014. 5. 30

도 급 비 : 14,700천원

도 급 자 : ㈜에코밸리 대표 이재흥

용역내용 : 국립중앙의료원 담장철거 및 녹지조성 조경설계

□ 준공기한 연기

연기기간

- 당  초 : 2014. 3. 12 ~ 2014. 5. 30

- 변  경 : 2014. 3. 12 ~ 2014. 9. 30

연기사유 : 국립중앙의료원의 추진일정 연기 요청

[국립중앙의료원 시설팀-627(2014.5.28.)]

지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

국립중앙의료원 측에서 ‘국립의료원 현대화사업’과 연계하여 본 사업이 추진될 수 있도록 일정을 조정해 달라는 요청이 있는 건으로 위와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 국립중앙의료원 공문 1부.  끝.