등록번호	기획예산과-10170		주무관		예산팀장		기획예산과장		기획재정국장		부구청장
등록일자	2018.11.16.
			권상훈		박이만		정미선		권순우		전결 11/16 신상철
결재일자	2018.11.16.
공개구분	대시민공개
			협조
2018 회계연도 명시이월 처리
기획재정국 기획예산과

2018 회계연도 명시이월 처리

2018년도에 편성된 예산 중 사업계획 변경 또는 공사기간 연장 등으로

연도 내에 지출하지 못할 것으로 예상되는 사업예산에 대하여 사전에

의회의 승인을 얻어 명시이월 처리코자 함.

Ⅰ	관련 근거

□ 「지방재정법」제50조(세출예산의 이월)

□ 「서울특별시 중구 재무회계 규칙」제16조(예산의 이월) 및 제27조(이월예산의 집행)

Ⅱ	명시이월 대상 및 절차

□ 대상

□ 2018 회계연도 일반․특별회계 세출예산 중 연도 내에 그 지출을 끝내지

못할 것이 예측되는 사업예산

□ 절차

□ 이월계획수립(사업부서) ⇒ 이월예산 요구 ⇒ 이월예산안 작성 ⇒ 구의회 제출

⇒ 구의회 심사, 의결 ⇒  명시이월예산 확정(회계연도 완료 후 10일 이내)

Ⅲ	명시이월 내역

□ 이월 총계 : 15개 세부사업  12,785,770천원 (일반회계)

□ 세부내역

연번	부서명	사업명	통계목	명시이월액
		총 15건(일반회계)		12,785,770
1	자치행정과	찾아가는 동주민센터 운영	시설비	1,045,436
			시설부대비	5,000
			자산및물품취득비	45,689
2		자치회관 유지관리	시설비	15,111
3	문화관광과	동별역사전시공간 조성	시설비	28,418
4		도시 활력 증진 사업 (광희문문화마을관광명소화추진)	시설비	1,000,000
5	시장경제과	봉제업 활성화 지원	민간경상사업보조	100,000
6		패션봉제 활성화 지원	사무관리비	14,590
			민간경상사업보조	54,000
			시설비	64,000
			민간자본사업보조	83,115
7		전통시장 주차환경개선사업	사무관리비	500
			민간경상사업보조	16,780
8		화재취약 전통시장 환경개선	시설비	532,000
9	여성가족과	아이돌봄 지원	민간위탁금	80,000
10		국공립어린이집 확충	시설비	50,000
			민간자본사업보조	1,156,000
			자산및물품취득비	230,000
11	건축과	서소문밖 역사유적지 관광자원화	시설비	2,054,000
12	도로시설과	특별가로사업(지중화)	공기관등에대한자본적위탁사업비	3,648,026
13		청파로 문화거리 조성공사	시설비	1,500,000
14	건강도시과	시민건강관리센터 조성	시설비	273,105
			시설부대비	10,000
			자산및물품취득비	30,000
15	건강관리과	지역치매지원센터운영	시설비	200,000
			자산및물품취득비	550,000

(단위 : 천원)

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
						38,157,209 국 8,228,544 지특 500,000 기금 25,920 시 7,814,515 특금 5,620,250 구 15,967,980,000	12,785,770 국 375,000 지특 500,000 기금 12,960 시 2,166,435 특금 4,672,804 구 5,058,571
자치행정과								2018.10. 29. 특별조정교부금 결정 통보로 사업 시행을 위한 기간 부족
	동행정 내실화
		동행정 강화
			찾아가는 동주민센터 운영			1,588,500 특금 1,038,500 시 550,000	1,096,125 특금 1,003,882 시 92,243
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : (찾·동 공간개선) 명동주민센터 공간개선 ∘위 치 : 퇴계로20길 3 ∘규 모 : 총 면적 1,889.09㎡ ∘사업기간 : ‘18.11월~’19.6월 ∘총사업비 : 12,000천원 ∘추진사항 - 2018.3. 1층 민원실 및 외부 데크 설계 완료 2018.10. 특별조정교부금 교부	1,415,000 특금 955,000 시 460,000	1,020,839 특금 955,000 시 90,436
				시설비 및 부대비 (시설비)		5,000 특금 5,000	5,000 특금 5,000
				자산취득비 (자산및물품취득비)		168,500 특금 78,500 시 90,000	51,074 특금 43,882 시 1,807
			자치회관 유지관리			70,000 구 70,000	15,111 구 15,111
				시설비 및 부대비 (시설비)		70,000 구 70,000	15,111 구 15,111

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
문화관광과								명동주민센터 환경개선 사업 지연으로 인해 전시공간 조성사업 지연
	문화예술진흥
		지역문화예술 활성화
			동별역사전시공간조성			50,000 구 50,000	28,418 구 28,418
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 동별 역사 전시공간 조성 ∘위 치 : 명동주민센터 내 ∘사업기간 : 2013~2019 ∘이월액 : 28,418천원 ∘주요내용 : 동별 역사, 명소 등을 전시, 지역주민에게 지역의 역사문화를 향유할 수 있는 공간 제공	50,000 구 50,000	28,418 구 28,418
	새로운관광기반확충							적정 매입후보지 검토 및 단계별 매입절차에 따른 시간소요
		관광특구지원
			도시생활환경개선 (광희문 문화마을 관광명소화 추진)			1,000,000 지특 500,000 구 500,000	1,000,000 지특 500,000 구 500,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 광희문 문화마을 관광명소화 추진을 위한 주민공동이용시설 조성 ∘위 치 : 광희문 일대 (광희동,신당동,장충동) ∘사업기간 : 2017.3월~2018.12월 ∘이 월 액 : 1,000,000천원 (2017년 명시이월 5억원 포함하여 총사업비 15억원) ∘주요내용 - 광희문 일대 적정 부동산 매입 및 리모델링을 통한 생활문화공동체 공간조성 ∘향후계획 - 2018. 9.~11. ‣ 부동산 매물검토 및 소유주 협의 - 2018.12.~2019. 1. : 구유재산 심의 - 2019.1.~2. ‣ 공간활용 관련 벤치마킹 및 전문가 자문 - 2019.2.~7. ‣ 공간활용계획에 의한 리모델링	1,000,000 지특 500,000 구 500,000	1,000,000 지특 500,000 구 500,000

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
시장경제과								사업계획 변경에 따른 금년 사업 추진 기간부족 자원 발굴 및 자문 추진 후 2019년도 구체적 사업계획 수립 및 시행
	지역경제 활성화 (산업·중소기업/ 산업진흥·고도화)
		지역산업 진흥
			봉제업 활성화 지원		∘사 업 명 : 패션봉제 활성화 지원 ∘위 치 : 신당동 등 봉제집적지 ∘규 모 - 사업체 1,294개, 종사자 5,305명 ∘사업기간 : 2018.1.1.~12.31 ∘총사업비 : 300,000천원 ∘추진사항 - 환경개선사업 8개업체 - 봉제공장 DB 구축 - 패션·봉제 협업모델 공모사업 - 의류 원산지 표시 위반 단속 시행 - 봉제소공인 컨설턴트 지원, 협의체 간담회・워크숍 등 - 중구의류패션지원센터 운영	100,000 구 100,000	100,000 구 100,000
				민간이전 (민간경상사업보조)		100,000 구 100,000	100,000 구 100,000
			패션봉제 활성화 지원			264,000 시 164,000 구 100,000	215,705 시 142,267 구 73,438
				일반운영비 (사무관리비)		46,000 시 23,000 구 23,000	14,590 시 9,710 구 4,880
				민간이전 (민간경상사업보조)		54,000 시 27,000 구 27,000	54,000 시 27,000 구 27,000
				민간자본이전 (민간자본사업보조) (이전재원)		100,000 시 50,000 구 50,000	83,115 시 41,557 구 41,558
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 공용재단실 구축 ∘위 치 : 청구로6길 52(1층) ∘사업기간 : 2018. 10. ~ 2019. 3. ∘총사업비 : 300,000천원 ∘추진사항 - 공용재단실 및 센터 사무실 공사 내역설계 - 자동재단기 등 장비 구입	64,000 시 64,000	64,000 시 64,000	리모델링 공사를 위한 도면, 내역설계 기간필요 설계 용역 결과 반영에 따른 공사업체 선정, 공사기간 부족 등으로 연내 사업 추진 불가

(단위 : 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
시장경제과								2018년도 주차환경개선 (주차장이용보조)사업 구예산 미확보로 사업시행 지연 2019년도 이월 하여 사업 계속 시행
	지역경제활성화
		지역산업 진흥
			전통시장 주차환경개선사업			34,560 기금 25,920 시 8,640	17,280 기금 12,960 시 4,320
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 : 주차환경개선사업 ∘위 치 : 을지로157 (대림상가) ∘사업기간 : 19..1~19.6. ∘총사업비 : 17,280 ∘추진사항 - 18‘.7월 주차장 이용보조시행 ∘향후계획 2018년 12월 계약 연장 협약 2019년1월~6월 이용보조지원	1,000 기금 750 시 250	500 기금 375 시 125
				민간이전 (민간경상 보조사업)		33,560 기금 25,170 시 8,390	16,780 기금 12,585 시 4,195
			화재취약 전통시장 환경개선			특금 537,750	특금 532,000	중부시장 캐노피공사 및 청평화시장 점포구획용 방화천막설치 사업은 현장확인결과 당초 신청했던 사업구간과 다른 부분이 있었으며, 사업실행에 따른 해당 점포주 또는 건물주 동의문제 등으로 장시간 소요 비상소화장치함 전면교체(27개소) 및 신설(3곳)은 설치 장소 파악 및 소화기 이설 등 종합적 검토와 소방서 협의 필요 금년 내 집행하기에는 시간적으로 촉박하여, 효율적 추진을 위해 이월하여 집행하고자함
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 화재취약 전통시장 긴급보수사업 ∘위 치 : 중앙시장 외 2곳 ∘사업기간 : `18.11. ~`19.3. ∘총사업비 : 532,000 ∘추진사항 - `18.11. 사업구간 협의 ∘향후계획 - `18.12. 협약서 체결 - `19. 1. 설계 및 공사시행 - `19. 3. 준공 및 정산	특금 537,750	특금 532,000

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
여성가족과								돌봄수요가 가장 많고 공간이 우선적으로 확보된 남산타운아파트 돌봄센터 조성과 관련하여, 리모델링 공사비 예산 부족 및 입주자 동의절차 필요 등 연내 공사 관료가 어려운 상황 실시설계비를 제외한 사업비를 명시이월하여 내년도 서울시 추진일정에 맞춰 3월 개관을 목표로 추진하고자 함
	보육가족 및 여성복지 증진
		가정복지 지원
			아이돌봄지원			94,532 구 94,532	80,000 구 80,000
				민간이전 (민간위탁금)	∘사 업 명 : 온아이돌봄센터운영 ∘위 치 : 관내 유휴공간 ∘규 모 : 66㎡이상 ∘사업기간 : 2019. 1 ~ 4 ∘총사업비 : 286,676천원 ∘추진사항 - 2018.2 추진 방침 - 2018.3 1회 추경예산 편성 - 2018.3~6 설치장소 조사 아파트 등 공간 확보 - 2018. 6 건축과 비용 산출 - 2018.. 8 서울시 사업신청 - 2018. 9. 아파트 주민동의 관련 법률자문 질의	94,532 구 94,532	80,000 구 80,000
		보육서비스 수준 제고						- 신당하나어린이집 확충사업 신당하나유보라스테이(단지 내 어린이집 예정지) 공사지연으로 인한 기본 내부시설(벽체,창호,위생시설 등) 미비로 금년 내에 인테리어 공사 착공이 어려워 2019년 회계연도로 이월하여 사업비를 지출하고자 함. - 소공어린이집 확충 사업 서소문 도시환경정비사업(구역 내 어린이집 예정지)이 금년 내 실시계획 인가가 어려움이 예상됨에 따라, 사업비 지출을 2019년 회계연도로 이월하여 사용하고자 함.
			국공립어린이집 확충(보조)			1,759,098 시 1,750,098 구 9,000	1,436,000 시 1,427,000 구 9,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 국공립어린이집확충 ∘위 치 : 중구 관내 ∘사업기간 : 2019.1.~12. ∘총사업비 : 1,750,098천원 ∘추진내용 - 국공립 신당하나어린이집 확충 (왕십리로 407) - 국공립 소공동어린이집 확충 (서소문동 122외 3필지)	50,000 시 50,000	50,000 시 50,000
				민간자본이전 (민간자본사업보조)		1,421,098 시 1,421,098	1,156,000 시 1,156,000
				자산취득비 (자산및물품취득비)		279,000 시 270,000 구 9,000	230,000 시 221,000 구 9,000

(단위 : 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
건축과								특별조정 교부금 교부에 따른 추가 공사로 회계연도내 집행 불가 예상.
	도시개발
		도시자원활성화
			서소문밖 역사유적지 관광자원화			23,822,164 국 7,853,544 시 4,850,172 특금 2,054,000 구 9,064,448	2,054,000 국 0 시 0 특금 2,054,000 구 0
				시설비및부대비 (시설비)	∘사업명 : 서소문역사문화공원조성 ∘위 치 : 칠패로 5(서소문공원 일대) ∘규 모 : 21,363㎡ ∘사업기간 : 2013. 1.~ 2018. 12. ∘추진사항 - 2016. 2. : 철거공사 착공 - 2016. 10. : 철거공사 준공 - 2017. 11. : 본공사 착공 - 2018. 12. : 공사완료	23,822,164 국 7,853,544 시 4,850,172 특금 2,054,000 구 9,064,448	2,054,000 국 0 시 0 특금 2,054,000 구 0
도로시설과
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)			6,182,500 특금 1,490,000 구 4,692,500	3,648,026 특금 582,922 구 3,065,104
				자치단체등 자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	∘사 업 명 : 예수마을교회주변 지중화사업 ∘위 치 : 다산로44길 76~ 퇴계로88길 48 ∘규 모 : 지중화 190m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 1,650,000 시 362,500, 구 562,500, 사업자 725,000	562,500 구 562,500	562,500 구 562,500	한전에 ‘18년도 지중화사업 지자체 승인 요청 하였으나 미반영 되어 ‘19년도 지자체 승인 요청중에 있으며 시비 또한 미반영으로 금년도 지중화사업이 지연되고 있어 명시이월하여 사업추진
					∘사 업 명 : 태양마트 앞 동호로지중화사업 ∘위 치 : 동호로7길 ∘규 모 : 지중화 250m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 2,700,000 시 625,000, 구 825,000, 사업자 1,250,000 ∘추진사항 - 2018.7. : ‘19년도 시예산편성 요구 - 2018.9. : 추경(구비) 확보 (325백만원) - 2018. 10. : 구 자체 투자심사	825,000 구 825,000	825,000 구 825,000	한전에 ‘18년도 지중화사업 지자체 승인 요청 하였으나 미반영 되어 ‘19년도 지자체 승인 요청중에 있으며 시비 또한 미반영으로 금년도 지중화사업이 지연되고 있어 명시이월하여 사업추진

(단위: 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
				자치단체등 자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	∘사 업 명 : 퇴계로8길지중화 ∘위 치 : 회현동주민센터~ 회현제2시범아파트 ∘규 모 : 지중화 340m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 2,600,000 시 600,000, 구 800,000, 사업자 1,200,000 ∘추진사항 2018. 1. : 시예산편성 요청 2018. 3. : 한전 지자체승인 요청 2018. 4. : 시예산편성 재요청 - 2018. 5. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : ‘19년도 시예산편성 요구 - 2018. 10. : 구 자체 투자심사	800,000 구 800,000	800,000 구 800,000	한전에 ‘18년도 지중화사업 지자체 승인 요청 하였으나 미승인되어 ‘19년도 지자체 승인 요청중에 있음. 시비 또한 편성요구하였으나 미반영 되어 금년도 지중화 사업이 지연되고 있어 명시이월하여 사업추진
					∘사 업 명 : 신당초등학교 주변지중화 ∘위 치 : 난계로128~퇴계로 90길 39 ∘규 모 : 지중화 190m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 1,500,000 시 350,000, 구 450,000, 사업자 700,000 ∘추진사항 - 2018. 1. : 한전 지자체승인 - 2018. 6. : 한전 협약 체결 - 2018. 9. : 통신사 협약 체결 추진중	450,000 구 450,000	450,000 구 450,000	제반비용부담이 가중되는 기간통신사업자들의 피동 적인 사업추진 등의 사유로 사업지연 사례가 빈번함에 따라 자치구에서 적기 예산 집행에도 많은 어려움이 있음. 기간통신사업자의 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진

(단위: 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
				자치단체등 자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	∘사 업 명 : 청파로(합동시장) 지중화 ∘위 치 : 청파로 461~443 ∘규 모 : 지중화 200m ∘사업기간 : ‘18. 10 ~ ’19.6 ∘총사업비 : 2,300,000천원 시 500,000, 구 800,000, 사업자 1,000,000 ∘추진사항 - ‘18. 07 : 협약체결 - ‘18. 08 : 설계완료 - ‘18. 09 : 자재수급 - ‘18. 10 : 착공예정	800,000 구 800,000	360,000 구 360,000	‘18년에 지중화 관로공사비를 지출하였으나 선로공사에 대한 실시설계 지연으로 지중화 부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
					∘사 업 명 : 남산옛길 지중화 ∘위 치 : 퇴계로12길 41~ 퇴계로12길 78 ∘규 모 : 250m ∘사업기간 : 2018.10.~2019. 6. ∘총사업비 : 2,297,000 구 1,490,000, 사업자 807,000 ∘추진사항 - 2018. 2. : 특별교부금 편성 - 2018. 3. : 한전 협약 체결 - 2018. 7. : 통신사 협약 체결 2018. 8. : 한전 공사비 납부 2018. 9. :통신사 관로공사비 납부	1,490,000 특금 1,490,000	582,922 특금 582,922	‘18년에 지중화 관로공사비를 지출하였으나 선로공사에 대한 실시설계 지연으로 지중화 부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)						명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
					자치단체등 자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	∘사 업 명 : 삼일대로8길(중부서 주변)지중화 ∘위 치 : 삼일대로8길 ∘규 모 : 지중화 80m ∘사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 6. ∘총사업비 : 636,727 시 94,000, 구 267,500, 사업자 275,217 ∘추진사항 - 2017. 5 : 협약체결(한전) - 2017. 6 : 협약체결(통신사) - 2018. 3 : 한전 납부고지서 송부 - 2018. 8 : 시비 재배정 (94,000천원) - 2018. 9 : 구 추경예산 확보 - 2018. 9 : 한전 공사비 납부	230,000 구 230,000	66,457 구 66,457	공사비 부족으로 사업추진이 지연되었으나 2018년 제2회 추경(구비) 및 시비 추가 재배정을 통해 예산확보가 완료되어 사업을 추진코자 하였으나 통신사업자의 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
						∘사 업 명 : 마른내로지중화 ∘위 치 : 중구청사거리~ 명보극장사거리 ∘규 모 : 지중화 450m ∘사업기간 : 2018.10.~2019. 12. ∘총사업비 : 3,500,000 시 825,000, 구 1,025,000, 사업자 1,650,000 ∘추진사항 - 2018. 1. : 한전 지자체승인 - 2018. 2. : 한전 협약 체결	1,025,000 구 1,025,000	1,147 구 1,147	제반비용부담이 가중되는 기간통신사업자들의 피동 적인 사업추진 등의 사유로 사업지연 사례가 빈번함에 따라 자치구에서 적기 예산 집행에도 많은 어려움이 있음. 기간통신사업자의 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
			청파로 문화거리 조성공사				1,600,000특금 500,000 구 1,100,000	1,500,000 특금 500,000 구 1,000,000	선행공사(지중화) 및 설계용역 보완 추진에 따라 본사업 익년 시행
				시설비및부대비 (시설비)		∘사 업 명 : 청파로 문화거리 조성공사 ∘위 치 : 청파로 ∘규 모 : 보행친화적 거리 조성 B=35m, L=300m ∘사업기간 : 2018. 3. ~ 2019. 11 ∘총사업비 : 1,600,000 구 : 1,100,000 시 : 500,000(보조금) ∘추진사항 - 2018. 3. : 설계용역 발주 - 2018. 4. : 설계용역 착수 - 2018. 8. : 교통안전시설 심의 - 2018. 9. : 지중화 착수준비중	1,600,000특금 500,000 구 1,100,000	1,500,000 특금 500,000 구 1,000,000

(단위: 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
건강도시과								현재 논의중에 있는 구정 전반의 정책진단 결과 및 조직개편 방향에 맞추어 보건소 청사 사무실 재배치 등 공간활용 및 건강관리센터 운영 기능에 대한 심도있는 검토 주민 중심 만성질환 예방 관리에 대한 포괄적 건강관리서비스를 위한 효율적 프로세스 구축 및 실시설계 등을 위한 전문가(서울시 서비스 디자인 자문 용역업체)와의 충분한 자문 필요
	구민보건수준향상
		건강한중구만들기
			시민건강관리센터 조성			313,105 시 313,105	313,105 시 313,105
				시설비및부대비	∘사업명 : 중구건강관리센터 설치 ∘위 치 : 중구보건소 내 ∘총사업비 : 313,105천원 ∘추진사항 - 서비스 디자인을 적용한 중구 건강관리센터 조성 : 보건소 1층 및 3층 공간 재배치 공사 등 (서비스 이용동선 감축과 효율적 업무 추진을 위한 공간 통합 및 재배치)	283,105 시 283,105	283,105 시 283,105
				자산취득비		30,000 시 30,000	30,000 시 30,000
건강관리과								치매안심센터 기능보강을 위해 치매환자쉼터 및 가족카페를 설치하여야 하나 적합한 장소가 선정되지 않아 당해연도 지출이 불가능하여 2019년 회계연도로 이월하고자 함
	구민의 건강수준 향상
		의료소외계층에 대한 의료접근도 향상
			지역치매지원센터 운영-치매안심센터 기능보강			750,000 국 375,000 시 187,500 구 187,500	750,000 국 375,000 시 187,500 구 187,500
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 치매안심센터 기능보강 (치매환자쉼터 및 가족카페 설치) ∘총사업비 : 총750,000천원 ∘추진사항 - 2017.12. 치매안심센터 기능 보강비 수요조사서 제출 2018. 3. 치매안심센터 기능보강 국시비 보조금 교부 2018. 9. 치매안심센터 기능 보강에 따른 구비 추경예산 확보	200,000 국 100,000 시 50,000 구 50,000	200,000 국 100,000 시 50,000 구 50,000
				자산취득비 (자산 및 물품취득비)		550,000 국 275,000 시 137,500 구 137,500	550,000 국 275,000 시 137,500 구 137,500

끝.