문서번호	주차관리과-24517			주무관		주차장시설팀장		주차관리과장		건설안전교통국장
결재일자	2018.11.16.
				이충열		김수천		代최재훈		11/16 김기운
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		『우이동 교통광장 복개구조물 정밀안전진단 및 실시설계 용역』 준공기한 연장보고
2018.11.16.
강 북 구 〔주차과리과〕

『우이동 교통광장 복개구조물 정밀안전진단 및 실시설계 용역』

준공기한 연장 보고

현재 진행중인「우이동 교통광장 복개구조물 정밀안전진단 및 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 함

Ⅰ		용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 우이동 교통광장 복개구조물 정밀안전진단 및 실시설계 용역

❍ 계약업체 : ㈜이젠리버텍

❍ 계약기간 : 2018. 8. 23. ~ 2018. 11. 27.

❍ 용  역  비 : 35,989천원

Ⅱ		보고내용

❍ 연기사유

- 과업 대상지에 대하여 도로관리과 제설전진기지 활용 협조 요청에 따라 당초 16.5ton의 설계하중에서 제설차량 이동 및 제설제 적치, 염수통 설치 등 설계하중을 50ton으로 변경되므로, 구조 재해석 및 복개구조물의 코어재취 등 추가 작업에 따른 기간이 소요됨에 따라 용역기간 연장이 필요함

※ 도로관리과-14567(2018.10.15.) 제설전진기지 활용 협조 요청

❍ 변경사항

사 업 명	기간 변경내용		비고
	당 초	변 경
우이동 교통광장 복개 구조물 정밀안전진단 및 실시설계 용역	2018. 8. 23. ~ 2018. 11. 27.	2018. 8. 23. ~ 2018. 12.. 31.	계약금액 변경없음

❍ 귀책사유/지체상환금 부과여부 : 강북구 / 미부과

붙임 : 합의각서 1부.  끝.