문서번호	녹지관리과-4724
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
홍성실	문경재	11/20 김인숙

- 뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성공사 - 공사기간 연기 검토결과 보고

2018. 11.

공 원 부

(녹지관리과)

「뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성공사」

공사기간 연기 검토결과 보고

「뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성공사」 현장점검(‘18.11.16)결과 일부 시설 등 추가 보완사항 작업기간이 필요함에 따라 공사기간 연기 검토결과를 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성사업

○ 공사기간 : 2018. 07. 26 ~ 11. 22

○ 주요 공사내용

- 시설물 설치 : 하늘길놀이대, 드라이가든, 북놀이대, 잎새소리, 나무 실로폰 설치 등

- 수목식재 및 이식 : 식재 – 2,166주(교목 느티 등 4종 31, 관목 조팝 등 식재

- 시설물 철거 : 노후 파고라 등 18종 36개소, 고무칩∙콘크리트 포장 1,090㎡ 등

○ 추진공정 : 85%(주요 시설물 설치완료 및 설치 중, 관목류 및 지피초화류 미식재)

○ **********************

○ **************

○ *****************************************************

□ 검토결과

○ 공사기간 연기

- 당    초 : 2018. 07. 26 ~ 2018. 11. 22.

- 변    경 : 2018. 07. 26 ~ 2018. 12. 06.

- 연기사유

▸안전검사 등에 따라 공기 부족 (14일 연기)

∙ 놀이시설 안전관리법에 따른 안전성 검사기간 소요 등

∙ 낙서벽 상부 라운딩 부분을 어린이들이 오르지 않도록 추락방지시설 보완

- 공사기간 연기에 따른 귀책사유 : 한강사업본부

□ 조치계획

○ 추가 공종 보완에 따른 소요기간(14일)을 연장하여 정밀 시공추진

○ 놀이시설 합격판정시 준공계 접수 및 공사 완료처리

붙 임  1. 자체 점검결과 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.