투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 (뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성공사)

1. 녹지관리과-4724(2018.11.20.)와 관련입니다.

2. 「뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성공사」기간을 다음과 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 뚝섬 한강공원 강가햇살놀이터 조성공사

나. 위    치 : 강가햇살놀이터(구 고래의 꿈 놀이터 / 광진구 자양3동 704-1)

다. 공사개요 : 하늘길놀이대, 드라이가든, 북놀이대, 잎새소리, 나무실로폰 설치 등

라. 도 급 자 : *************************************

마. 준공기한 연기

○ 당   초 : 2018. 7. 26 ~ 11. 22

○ 변   경 : 2018. 7. 26 ~ 12. 06

- 연기사유 : 안전검사 등에 따라 공기부족 (14일 연기)

※ 귀책소재 : 한강사업본부 / 지체상금 : 미부과

바. 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 뚝섬 어린이놀이터 정비(시민참여), 시설비(100-401-01)

붙  임  1. 방침서 1부.

2. 공사준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	홍성실		녹지관리과장	11/20 문경재
협조자
시행	녹지관리과-4726	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부(녹지관리과)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	(02)3780-0833	/전송	(02)3780-0745	/	s.shong@seoul.go.kr	/	부분공개(6)