투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(접속단자대 외 2종) 납품기한 변경 의뢰 (올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사)

1. 올대감 18-263(2018.11.20.)호와 관련입니다.

2.『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사』관급자재(접속단자대 외 2종)      납품기한 변경을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 납품기한 변경내용

순번	납품요구번호	품목	납 품 기 한
			당 초	변 경
1	12-18-2-08153-00	접속단자대	2018.12.31.	2019.12.31.
2	12-18-1-10712-00	LED가로등기구(125W)	2018.12.31.	2019.12.31.
3	12-18-1-10713-00	철제가로등주(10M)	2018.12.31.	2019.12.31.

붙임  감리단 공문 및 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	유병기		설비부장	11/21 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-15960	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)