투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(케이블 트레이 외 3종) 납품기한 변경 의뢰 [강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사]

1. 서영강남18-243(2018.11.20.)호와 관련입니다.

2.『강남순환도시고속도로(4공구) 전기공사』관급자재(케이블 트레이 외 3종)      납품기한 변경을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 납품기한 변경내용

순번	납 품 요 구 번 호	납 품 품 목	납 품 기 한
			당 초	변 경
1	12-18-1-87879-00	케이블 트레이	2018.12.15.	2019.12.31.
2	12-18-1-87673-00	철제가로등주	2018.12.14.	2019.12.31.
3	12-18-1-87672-00	LED가로등기구(150W)	2018.12.14.	2019.12.31.
4	12-18-2-52035-00	영상감시장치	2019.01.13.	2019.12.31.

붙임  감리단 공문 및 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	유병기		설비부장	11/21 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-15961	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)