투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경(총차7회, 4차2회) 및 준공기한 연장 계약의뢰(잠원2빗물펌프장 신설공사)

우리 본부에서 건설사업으로 시행중인 「잠원2빗물펌프장 신설공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차7회,4차2회) 및 준공기한 연장계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사

나. 계약금액

구 분	총 차 분(원)	4차분(원)	비 고
도 급 비	17,637,736,000	3,894,290,000

다. 공사기간 : 2013. 1. 3. ∼ 2018. 02. 28.

라. 계 약 자 : 에스트건설 대표이사 김수관

마. 설계변경 내역

구 분	당 초 금 액(원)	변 경 금 액(원)	증 ․ 감(원)	비 고
총차분	17,637,736,000	18,346,068,000	708,332,000	도급비
4차분	3,894,290,000	3,894,290,000	0	도급비

바. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
총차분	2013.01.03. ~ 2018.02.28.	2013.01.03. ~ 2018.05.31.	증)92일

사. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책, 잠원빗물펌프장 시설용량증대,        시설비및부대비, 시설비.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계도서 2부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송영배		치수시설과장	조성만		방재시설부장	02/23 이임섭
협조자	주무관	이병환
시행	방재시설부-2305	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개