투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(직접공사비(물푸기) 반영 실정보고 재검토 요청)

1.업무지시현장 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K) 주식회사 선진엔지니

어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-11-16 17:11:08

3.지 시 내 용

1)  지감922-18-482호(2018.11.13.)와 관련입니다.

2) 서울지하철 9호선3단계 922공구 건설공사 공사기간 연장에 따른 물푸기 비용 반영을 위한 실정보고 건에 대하여 검토한바,

3) 내역서상 정거장과 집수정 관리비를 각각 적용하였으나 별첨 서울시도시철도건설 토목분야 적산자료를 검토한바 본선 개착구간, 수직갱, 정거장구간이 있을때에도 개착구간의 관리인이 동시에 시행하는 것으로 하여 되어 있는바, 재검토하여 주시기 바랍니다

별첨 : 서울시도시철도건설 토목분야 적산자료 1부.  끝.

주무관							임경태			토목2과장					11/16 방영복
협조자
시행			도시철도토목부-13503									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부															/
전화		772-7221						/전송			772-7306					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개