문서번호	문화시설과-9303
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화시설총괄팀장	문화시설과장
라도균	박정추	11/21 안준모

예술복합단지 조성 기본구상 및 타당성 조사용역

계약기간 조정(연장) 계획

2018. 11.

문화시설과

예술복합단지 조성 기본구상 및 타당성 조사 용역

계약기간 조정(연장) 계획

제3차 중간보고회 자문내용 및 서울시립교향악단과 세종문화회관의 주요 의견 반영을 위해 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 예술복합단지 조성 기본구상 및 타당성 조사 용역

○ 용역대상 :  종로구 세종로 175(세종문화회관), 세종로 80-1(세종로 공원)

○ 용역기간 : ‘17. 5. 25. ~ ’18. 11. 24.

○ 계약금액 : 금449,589천원

- ’18년예산 : 270,000천원(사고이월)

○ 용역업체 : ㈜메타기획컨설팅외 ㈜종합건축사무소 디자인캠프문박디엠피

○ 과업내용

- 예술복합단지 조성 필요성 및 현황조사(기초자료 조사 및 분석 등)

- 예술복합단지 조성을 위한 기본조건 제시(분석･진단･평가)

- 예술복합단지 조성 목표 및 기본 방향 등 기본구상(안) 마련 및 적정규모 검토

- 경제, 기술, 사회 및 환경 등 종합적인 측면에서 사업 타당성 검토

- 시행계획 수립 및 운영·관리방안 마련 등

□ 추진경과

○ ’17. 02. :  예술복합단지 조성 타당성 조사 및 기본구상 용역 추진계획 수립

○ ’17. 05. :  제안서 평가 및 계약

○ ’17. 06. :  착수보고회 개최

○ ’17. 09. :  1차 중간보고회 개최

○ ’18. 01. :  2차 중간보고회 개최

○ ’18. 02. :  과업보완 및 계약기간 조정(1차)

○ ’18. 07. :  과업보완 및 계약기간 조정(2차)

○ ’18. 11. :  3차 중간보고회 개최

□ 계약기간 조정(연장)

○ 변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	금449,585,000원 (금사억사천구백오십팔만오천원)	금449,585,000원 (금사억사천구백오십팔만오천원)	변동 없음
계약기간	용역기간 : 2017.05.25.~2018.11.24.	용역기간 : 2017.05.25.~2018.12.08.	계약 기간 연장 조정

○ 연장사유 :  3차 중간보고회 자문의견 및 서울시립교향악단과 세종문화회관 의견수렴 내용 반영을 위해 계약기간을 연장하여 용역성과품 품질을 제고하고자 함

○ 지체상금 부과여부 : 미부과(용역주관사와 합의에 의한 과업기간 변경 등 조정)

□ 향후일정

○ 계약기간 조정 의뢰(→재무과)	‘18.11.21.

○ 계약재개	‘18.11.22.

○ 최종보고회 개최                                              ’18.12. ~

○ 용역 준공                                                    ’18.12.08.

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 계약기간 조정의뢰서 1부.