투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(돈화문민요박물관 건립 기계공사(총차 1회, 1차 1회)

1. 설비부-16076(2018.11.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 본부에서 시행중인“돈화문민요박물관 건립 기계공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차1회,1차1회) 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 돈화문민요박물관 건립 기계공사

나. 공사기간: 2018.01.10 ~ 2019.07.09

다. 도 급 자: ************

라. 설계변경 내용

(단위 : 원)

구 분		변경전	변경후	증□감
공사 기간	총차	**********************	**********************	*******
	1차	**********************	**********************	******
계약 금액	총차	***********	***********	**********
	1차	***********	***********	********** ************************

마. 설계변경 사유: 설계누락, 발전기 연도 규격 변경, 사업의뢰부서 건축평면 변경요청에 의한 물량 변경, 재배정 예산 잔액분 집행을 위한 잔여물량 중 일부를 1차공사에 반영 및 주공정 공사 예정 공정과 일치하기 위한 1차공사에서 장래분으로 내역변경.

바. 예산과목: 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 돈화문 전통문화시설 건립,시설비.

붙임  1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차, 1차) 각 1부.

3. 건설사업관리기술단 공문(합의각서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이강욱		건축설비과장	김은덕		설비부장	11/23 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-16113	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개(5)