등록번호	도로시설과-13614		주무관		도로계획팀장	도로시설과장		안전건설국장		부구청장		구청장
등록일자	2018.11.16.
			이장환		代백서종	신대식		서창수		신상철		11/26 서양호
결재일자	2018.11.26.
공개구분	대시민공개
			협조	주무관			남석윤
				예산팀장			박이만
				기획예산과장			정미선
- 청구로 패션문화거리 조성공사 - 예 산 활 용 계 획
안 전 건 설 국 도 로 시 설 과

- 청구로 패션문화거리 조성공사 -

예 산  활 용 계 획

우리구에서 시행하고 있는 청구로 패션문화거리 조성공사와 관련하여 공사 시행 중 추가 정비 물량이 발생하여 부족한 사업비에 대해 낙찰차액을 활용하여 공사를 완료하고자 함.

Ⅰ		공사 개요

공 사 명 : 청구로 패션문화거리 조성공사

공사위치 : 청구로(광희문∼청구역)

규    모

- 실시설계 용역    : 실시설계, 주민설명회 시행

- 보행환경개선공사 : 차도포장 55a, 보도포장 27a, 측구설치 910m

- 폐기물 처리용역  : 폐콘크리트 874t, 폐아스콘 274t

- 가로등 개량공사  : 가로등주 29본 이설, 가로등기구 37등 교체

- 신호등 교체공사  : 설계, 감리 용역(교통신호기 교체, 이설 4개소)

총사업비 : 1,000백만원(시비 300백만원, 구비 700백만원)

설계기간 : 2018. 2. ∼ 2018.  5.

설 계 사 : (주)서경기술공사 대표 장나리

공사기간 : 2018. 7. ∼ 2018. 12.

시 공 사 : 삼현기업(주) 대표 김성춘 (보행환경개선공사)

예천환경산업주식회사 대표 황옥순 (폐기물처리용역)

㈜마하에이스 대표 주기환 (가로등 개량공사)

㈜동림티엔에스 대표 이탁수(신호등 교체공사 설계, 감리 용역)

Ⅱ		예산 현황

단위 : 원

구 분	품 의 금 액	원 인 행 위 액	낙 찰 차 액	비 고
계	981,355,510	887,078,520	94,276,990
실시설계 용역	22,000,000	19,501,240	2,498,760	시비
보행환경개선공사	535,913,000	462,551,000	73,362,000
폐기물 처리용역	49,208,000	43,025,800	6,182,200
가로등 정비공사	86,471,000	75,118,050	11,352,950
신호등 교체공사 설계 감리 용역	11,013,600	10,132,520	881,080
관급자재비	276,749,910	276,749,910	-
이전비	-	-	-	18,644,490

Ⅲ		예산 활용계획

본 공사는 침체된 지역경제를 되살리고 거리에 활력을 불어넣어 문화·관광을 활성화하기 위한 사업으로 해당 구간의 보도블록 및 측구정비를 시행하였으나 현장 여건 상(차로폭 6m로 축소됨에 따라 차량 정체 민원 및 안전사고 우려) 야간에 공사를 진행하여야 하는 구간이 존재하여 계약금액과 이전비로는 정비가 어려움.

또한 선행 공사인 지중화공사가 계획보다 늦어져 금해 공사준공이 불가능하여 예산을 조정하여 사고이월 필요.

※ 잔여 공사비(낙찰차액 94,276,990원, 이전비 18,644,490원) 산출내역

- 콘크리트 깨기, 경계석 설치 등 주간→주야간 병행, 증 85백만원

이에 낙찰차액(94,276,990원)을 활용하여 2019년 6월까지 공사를 완공하고자 함.

Ⅳ		향후 추진계획

신속히 정비공사 추진, 추후 설계변경 시행.

- 2019. 3 : 동절기 통제기간(12월∼2월) 후 공사 재개

- 2019. 6 : 공사준공

붙  임: 1. 일상감사 결과 1부.

2. 지출집행현황 1부.  끝.