투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청_노들섬 특화공간조성사업 "전기히터 구매"

1. 설비부-15910호(2018.11.20.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인「노들섬 특화공간조성사업」에 소요되는 관급자재에 대하여 납품기한을 연기 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사 “전기히터(천장형복사난방패널) 구매”

나. 연기내용

계약품목	계약금액(원)	납 품 기 한		납품요구번호
		당 초	변 경
전기 히터	12,400,000	2018.11.22~2018.12.22	2018.11.22~2019.06.30	121825355900

다. 연기사유: 조달계약 시 임의 정해진 납품기한을 당초 납품요구 기한까지로 조정

*****************

*****************

붙임: 1. 납품기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	11/27 권오식
협조자
시행	설비부-16227	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)