문서번호	설비부-16321
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
공혜성		여인웅	11/28 권오식
협조

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 사업 전기공사』

임시가로등 설치 및 교체 실정보고 검토

2018. 11.

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 전기공사』

임시가로등 설치 및 교체 실정보고 검토

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 전기공사』와 관련하여 감리단으로부터 제출된 임시가로등 부분설치 및 파손가로등 교체에 따른 실정보고 사항을 검토하고 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 전기공사

□  위    치 : 남부순환로 오류IC ~ 매봉초등학교 구간

□  규    모 : 가로등 및 교통신호등 이설 및 설치 1식

□  공사기간 : 2016.04.14.~2019.03.25

□  공 사 비 : (총차)389백만원 (2차)272백만원

□  감 리 사 : ㈜동일기술공사&(주)지아이건설기술그룹

□  시 공 사 : 아산정보통신(주) 대표 홍수길

2		관련근거

□ 남부감 제2018-268(`18.11.26)

: 임시가로등 부분설치 및 교체에 대한실정보고

임시가로등 파손사진	임시가로등 추가 설치 구간사진

3		실정보고 내용

□ 변경내용 및 사유

구 분	변경사유	증․감 (천원)
매봉초 임시가로등(CDM150W) 신설 14개	․구로구청 도로과(주민민원) 요청 ․보행자 안전통행 및 주행차선도로 조도확보	증) 16,745
공영주차장 앞 가로등 임시이설 및 원위치 복구 4본	․토목공사 블록옹벽시공시 가로등 저촉	증) 5,753
오류IC 임시가로등 신설 4본 기존가로등 이설 5본	․토목공사 오류IC 가교 설치로 조명 이설 및 추가 설치 필요	증) 10,276
본선구간 등기구 교체 14개 안정기 교체 8개	․임시가로등 설치시일이 24개월 이상 경과하여 보수 필요	증) 10,452
매봉초 분전반 이설 1대	․토목공사 교통전환시 간섭으로 이동 필요	증) 1,412
작은굴다리 분전반 이설 1대	․한전 계량기 검측불가로 인한 이동 필요

□ 공사비 변경 사항

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	원	-	26,766,579	증) 26,766,579
제 경 비	원	-	13,813,421	증) 13,813,421
공 급 가 액	원	-	40,580,000	증) 40,580,000
부 가 세	원	-	4,058,000	증) 4,058,000
도 급 비	원	-	44,638,000	증) 44,638,000
관 급 자 재	원	-	2,724,000	증) 2,724,000
총 공 사 비	원	-	47,362,000	증) 47,362,000

□ 관급자재 구매

순번	품 명	규 격	단 위	수량	단가(원)	총액(원)	비 고
1	메탈할라이드램프	CDM 150W	EA	28	66,800	1,870,400
2	메탈할라이드 램프용 안정기	CDM 150W	EA	22	38,800	853,600
						2,724,000

□ 감리단 의견

○ 「남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화 전기공사」시행중 토목공사 가시설 단계별 공사에 따른 이설과 매봉초교 앞 보행통로 조도불량으로 민원이 발생되고 있는 바, 주민통행과 운전자 차량통행의 안전을 위하여 임시가로등 부분설치가 타당하다고 판단 됨.

○ 소요공사비를 면밀히 검토한 결과 적정하다고 판단되며, 증액되는 도급비 44,638,000원에 대하여는 도시기반시설본부 승인 절차에 따라 추후 설계변경에 반영함이 적정하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□  기술지원 건설사업 전기기술자(박탁순)가 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고, 증액되는 공사비는 설계변경시 내역반영하고자 하며,

□  임시가로등에 소요되는 관급자재는 건설총괄부에 구매 의뢰하여 공사 진행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 감리단 관련공문 및 검토의견서 1부.

2. 실정보고서 1부. 끝.