문서번호	시설과-8175
결재일자	2017.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
한상길	오임석	박진순	12/18 송천헌
협 조
	동물기획과장		代윤정상
	전략기획실장		김정열
	총무과장		이행용
	동물복지1과장		代한효동

「큰물새장 AI예방 개폐형 격리방사장 조성공사」 현안사항 조치계획 수립보고

2017. 12.

서울대공원

시 설 과

「큰물새장 AI예방 개폐형 격리방사장 조성공사」

현안사항 조치계획 수립보고

「큰물새장 AI예방 개폐형 격리방사장 조성공사」감독업무 수행 중 당초 예산부족으로 보류된 잔여분(격리방사장 6개소)에 대하여 긴급 조성지시 관련 조치 계획을 수립 보고.

☞ 관련근거 : 조류사 개선 공정점검 회의결과보고(8차) 동물기획과-5281 ‘17.11.21.

Ⅰ		사업개요

❏ 위    치 : 서울동물원 큰물새장 격리방사장 일원

❏ 공사개요 : 개폐형격리방사장 (9×9×6m)  12개소

전동스카이어닝 (5.5×9m)     28개소

❏ 사업기간 : 2017. 8. 30. ∼ 12. 20.

❏ 사 업 비                                                       (단위:원)

총 공사비	도 급 비	관 급 비	비 고
*************	*************	**********	***************** *****************

❏ 계약자 : 우신산업 주식회사  대표 정일훈

Ⅱ		현안사항

큰물새장  AI 예방 개폐형 격리방사장 잔여분 (6개소) 긴급 설치 필요

❏ 큰물새장 조류현황 : 총 13종 148수 (천연기념물 두루미, 황새 등)

❏ 당초 예산부족으로 전체 18개소 중 12개소만 우선 시행 (잔여분 6개소)

❏ 최근 대공원 인근 안양천 등에서 조류독감 발생으로 위기감 최고조로 부족한 개폐형 격리방사장 긴급 조성하여 신속하게 격리 수용 필요

☞ 추가설치 개요

- 개폐형격리방사장 (9×9×6m)   6개소

- 전동스카이어닝   (5.5×9m)  12개소

·*****************

Ⅲ		검토 및 조치의견

◇ 잔여분 추가 조성 방안 비교 검토

구분	관람방사장 시설물 보수보강 공사에 포함 시행	개폐형 격리방사장 조성 공사에 포함 시행
검토	ㅇ 12월 공사 계약으로 실 착공 지연 ⇒ 유사시 방사장 부족으로 대처능력 떨어짐. ㅇ 향후 하자 불분명으로 유지관리 어려움. ⇒ 신구 용접 접합부(철골 및 스카이어닝) 등.	ㅇ 연속 공정에 따른 공기 단축 유리. ⇒ 유사시 대처능력 향상 ㅇ 시공사가 동일하여 향후 유지(하자)관리 용이. ⇒ 신구 용접 접합부(철골 및 스카이어닝) 등.
추진방안		◯

기 시 행

- 격리방사장 (9m×9m)      10개소

- 먹이공급방사장 (9m×18m)  1개소

- 스카이어닝                28개소

잔 여 분

- 격리방사장 (9m×9m) 6개소

- 스카이어닝         12개소

◇ 조치의견

❏ 위 비교 검토 내용과 같이 기 시공중인 개폐형격리방사장 조성 공사에 설계변경 포함하여 추진함이 좋을것으로 판단됨.

Ⅳ		부족 예산확보 방안

❏ ***********************************************************************************************************

※ 사업계획(예산)변경 내역

(단위:원)

사 업 명	예산액		집 행 액	집행잔액 (낙찰차액)	증 · 감액	변경예산액
큰물새장 AI예방 개폐형격리방사장 조성공사	계	*************	*************	*	************	*************
	기금	*************	*************	*		*************
	추경	***********	***********	*	************	***********
큰물새장 시설물 보수·보강 공사	*************		*************	***********	************	*************
예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비 (2017년 추경)

Ⅴ		행정사항

❏ ’17. 12. 20. 설계변경 선 시행. (연내 원인행위 필요 )

❏ ’18. 01. 15. 설계변경 대공원 위원회 개최

붙임 : 1. 3차 실정보고서 각1부.

2. 조류사 개선 공정점검 회의결과보고(8차) 동물기획과-5281 ‘17.11.21. 끝.