투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 준공기한 연기 계약의뢰(구로고가 철거공사)

1. 우리 부에서 시행 중인 「구로고가차도 철거공사 건설폐기물처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 구로고가차도 철거공사 건설폐기물처리용역

나. 용 역 비 : 금 471,363,000원 (금사억칠천일백삼십육만삼천원)

다. 용역기간 : `18. 7. 17. ~ `18. 12. 16.

라. 용역업체 : ㈜오성개발 (대표자 : 최종민)

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계)

고가차도 철거, 시설비

바. 변경현황

[단위 : 천원]

구 분	전체분		비 고
	당 초	변 경
용 역 비	471,363	471,363	용역비 및 내역변경 없이 기간 변경
용역기간	`18. 7. 17. ~ `18. 12. 16.	`18. 7. 17. ~ `19. 7. 31.

사. 설계변경 사유

- 폐기물용역의 선행공종인 토목공사의 준공기한 연기

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	서민석		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/05 김영수
협조자	주무관	백종임
시행	토목부-20526	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	khaisky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)