“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	「난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 수립용역」 변경계약 요청(계약기간 변경)

1. 물재생시설과-15578(2018.12.4.)호와 관련입니다.

2. 「난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 수립용역」과 관련하여 계약자로부터 발주기관의 책임으로 인한 계약기간 변경요청이 있어 검토한 바 타당하기에 아래와 같이 계약기간 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내역

1) 용 역 명 : 난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경수립 용역

2) 용역기간 : 2018.5.16.~ 2019.1.10.

3) 계 약 자 : ㈜동해종합기술공사

4) 용 역 비 : 49,418,000원

나. 계약변경 요청내역

1) 요청사유

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 용역계약 일반조건(계약기간의 연장)에 의하여 발주기관의 책임으로 용역수행이 중단되었기에 계약기간의 연장이 필요함.

2) 계약기간 변경요청

- 계약기간 변경으로 인한 계약금액의 변경 없음.

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2018.5.16.~2019.1.10	2018.5.16.~2019.10.10	9개월 연장

붙임 1. 준공기한 연기의뢰서 및 합의각서 1부.

2. 계약기간 변경 방침서 1부. 끝.

	물재생시설과장
주무관	최창용		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	12/05 이철범
협조자	계약1팀장	조현
시행	물재생시설과-15648	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3824	/전송	02-2133-1043	/	choicy1326@seoul.go.kr	/	대시민공개