준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경수립 용역

나. 계약업체 : 주식회사 동해종합기술공사

다. 계약금액 : 금49,418,000원정(금사천구백사십일만팔천원)

라. 계약년월일 : 2018.5.15

마. 착공년월일 : 2018.5.16.

바. 준공기한 : 2019.1.10

2. 위 공사(용역, 물품)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2019.10.10

나. 연기사유 귀책소재 : 발주기관

다. 지체상금 부과여부(부과, 미부과)

라. 연기사유

- 국토부의 개발제한구역 관리계획 경미한 변경 관련 2층 건축물 규제사항 해소로 시급한 사업에 대한 경미한 변경 우선추진 필요

- 용역수행을 위해 난지물재생센터내 위법사항(불법증측) 해소가 선행되어야 하나, 유관기관(고양시, 덕양구)과의 협의지연으로 위법사항이 해소되지 않음.

첨부 : 연기사유 증빙자료(방침서) 1부.

2018년  12월  5일

담당 : 물재생시설과 직급 : 공업6  성명 : 최 창 용  (서명 또는 인)

팀장 : 물재생시설과 직급 : 토목5  성명 : 이 웅 희  (서명 또는 인)

부서장 : 물재생시설과 직급 : 공업4  성명 : 이 철 범  (서명 또는 인)

서울특별시(분임)재무관 귀하