철도안전관리체계 변경승인 세부 추진경과

No	추진내용		일자(기간)	비고
1	9호선 2·3단계 직영전환 요청(서울시 교통정책과)		’18.7.6.(금)	(3단계 개통: 10.27.)
2	변경 전 사전협의 신청(공사→한국교통안전공단)		’18.7.16.(월)	직영전환, 3단계 개통 통합 추진
3	철도안전관리체계 변경승인 추진계획 수립		’18.7.17.(화)
4	변경승인 추진단(TF) 인사발령 및 협조 요청		’18.7.17.(화)
5	사전협의 결과 통보(한국교통안전공단→공사)		’18.7.19.(목)	직영전환, 3단계 개통 분리 추진 (개통 후 직영전환)
6	변경승인 추진계획 변경(보안유지 및 사전협의 결과 반영)		’18.7.20.(금)
7	변경승인 추진단(TF) 인사발령 및 협조사항 보류 요청		’18.7.20.(금)
8	3단계 개 통	철도안전관리체계 변경승인 신청(공사→국토부)	’18.7.26.(목)
9		변경승인 검사계획 통보(한국교통안전공단→공사)	’18.8.3.(화)
10		서류검사(한국교통안전공단)	’18.8.13.(월)~8.17.(금)
11	9호선 3단계 개통일자 변경가능 통보(10.27.→12.1.예정)		’18.8.22.(수)
12	변경승인 추진계획 변경 ※ 안전계획처-22313(’18.8.23.)		’18.8.22.(수)	직영전환, 3단계 개통 통합 추진 (직영전환 후 개통)
13	승인추진단(TFT) 운영 ※ 전담(파견) 3명, 지원근무 1명		’18.8.27.(월)~완료 시
14	승인 문서체계(초안) 작성		’18.8.27.(월)~9.14.(금)
15	9호선 3단계 개통일자 확정(12.1.) ※ 8.28. 행정1부시장 회의		’18.8.31.(금)
16	변경 전 사전협의 재신청(공사→한국교통안전공단)		’18.9.7.(금)
17	사전협의 결과 통보(한국교통안전공단→공사)		’18.9.12.(수)
18	철도안전관리체계 변경승인 신청(공사→국토교통부)		’18.9.14.(금)
19	승인 문서체계(초안) 부서 검토(공사&자회사)		’18.9.17.(월)~9.28.(금)
20	변경승인 검사계획 통보(한국교통안전공단→공사)		’18.9.27.(목)
21	변경승인 서류검사(한국교통안전공단)		’18.10.1.(월)~10.5.(금)	결과: 보완요청 없음
22	변경승인 추진단(TF) 인원 보강(+전담 1명)		’18.10.16.(화)	경력자 보강
23	변경승인 (현장)검사 계획 알림(한국교통안전공단→공사)		’18.10.17.(수)
24	변경승인 현장검사(1차) (한국교통안전공단)		’18.10.22.(월)~10.24.(수)	보완요청사항 10건
25	변경승인 신청내용 보완제출(공사→한국교통안전공단)		’18.11.1.(목)	현장검사결과 반영
26	종합훈련	3단계 개통대비 비상대응 합동훈련 계획 수립	’18.11.2.(금)	예행연습(11.2/11.6)
27		3단계 개통대비 비상대응 합동훈련 실시	’18.11.6.(화)	석촌역⑨ 15시
28	변경승인 현장검사(2차) (한국교통안전공단)		’18.11.5.(월)~11.7.(수)	보완요청사항 5건
29	변경 위험도평가 결과보고		’18.11.13.(화)	위험요인 38건 안전대책 12건
30	종합시험운행	영업시운전 결과보고(市→공단)	’18.11.12.(월)
31		보완요청사항(6건) 통보(공단→市)	’18.11.12.(월)	조치완료(11.20.)
32		종합시험운행 결과보고(공단→국토부)	’18.11.20.(화)	공단(3명) 현장확인 (11.19.~11.20.)
33	변경승인 신청내용 보완제출(공사→한국교통안전공단)		’18.11.22.(목)	최종 보완제출
34	결과 보고	검사결과 대면보고(공단→국토부)	’18.11.21.(수)
35		검사결과 문서보고(공단→국토부)	’18.11.22.(목)
36	변경승인 검사 적정성 검토(국토교통부)		’18.11.23.(금)~11.26.(월)	결과: 적정이행 확인
37	변경승인 통보(국토부→공사)		’18.11.27.(화)	제2018-129호