문서번호	토목부-20961
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		여용석	12/11 김영수
협조

특정제품선정결과 반영 검토 보고

(밤 고개로 확장공사)

2018. 12.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

특정제품 선정결과 반영 검토 보고

(밤 고개로 확장공사)

공사 착공 후 선정된 특정제품(산석옹벽, 토낭식옹벽)을 공사에 반영하기 위하여 검토내용을 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 밤 고개로 확장공사

○ 규    모 : 도로확장 6차로 ⇒ 8차로 L=1.85㎞

○ 공사기간 : 2017.5.18 ~ 2019.6.30

○ 도 급 비 : 12,467백만원

○ 시 공 사 : 큰빛종합건설(주)

○ 감 리 사 : (주)제일엔지니어링외 1개사

□ 추진경위

○ 2017.05.18. : 공사착공

○ 2017.06.09. : 특정제품선정 심사(특허제10********호).

○ 2017.07. 23 : 실시설계용역 준공

○ 2017.07.24. : 보완 설계도서 납품(수성ENG → 도기본) 및 검토

- 5구간 산석옹벽은 지장물로 인하여 자연석 쌓기로 변경

- 보도사면 삭제로 토낭옹벽 삭제(300㎡)

- 산석옹벽 규격변경 (H=3~7m→3~9m)

○ 2018. 5. 25 : 설계변경 검토보고

○ 2018.06.14. : 설계변경 시행

- 도면 및 시방서, 내역서에 특허표기 명시 누락

○ 2018.10.30. : 도급자 실정보고

- 특정제품 선정된 공법으로 설계변경 실정보고

○ 2018.11.     : 업무지시(도기본→도급자)

□ 검토결과

○ 착공 후 선정된 특정제품을 계약내역에 반영하는 건으로

○ 단가는 설계당시 제출된 가격과 동 가격에 낙찰률을 적용한 가격사이에서 협의되지 않아 강제 협의율 적용(낙찰률 80% 적용)

○ 특정제품선정 및 협약 체결 후 삭제된 토낭식 옹벽 물량 보전

- 설계도서 검토 과정에서 토낭식 옹벽이 삭제되고 산석옹벽으로 변경되면서 높이가 9m까지 증가하여 경관과 경제성이 불리하므로

- 산석옹벽에 소단이 설치되는 5m상부와 산석옹벽이 자연사면과 접속되는 시·종점부는 토낭식 옹벽으로 변경하여 수렴

□ 공사비 검토

○ 검토결과를 건설사업관리용역 책임기술자에게 통보

- 상세 공사비 검토 및 제출 지시

□ 조치계획

○ 2016년 상반기 공사 준공을 위하여 공사시행이 가능한 구간을 우선  시행토록 조치(필요시 사후 단가 결정에 동의서 징구)

○ 건설사업관리용역 책임기술자의 공사비 검토 보고 후 설계변경 심사를 통하여 변경계약에 반영

붙 임 : 1) 특정제품선정결과 1부.

2) 원설계자의견서 1부.

3) 당초도면 1부.

4) 현재도면 1부.

5) 위치도 및 사진대지 1부.

6. 단가협의서 1부. 끝.