화곡고가 내진보강공사

(교량안전과/강서도로사업소)

□ 사업개요

◦위치 : 양천구 신월동 455 ~ 강서구 화곡동 889

◦규모 : 교량받침교체 32개소, 신축이음 설치 20m

◦기간 : 2018.9.11. ~ 2019.4.30(현재 공정율 30%)

◦총사업비 : 410,027천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 일반교량관리, 교량시설물내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비(도시개발특별회계 자체재원 54,833천원)

일반교량관리, 교량시설물내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비(도시개발특별회계 특별교부금 355,194천원)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '17이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		410,027,000	410,027,000	402,768,990	112,708,990	290,060,000 ( 0)	7,258,010
공 사 비		410,027,000	410,027,000	387,198,990	112,708,990	290,060,000 ( 0)	7,258,010
	도 급 비	351,822,010		344,564,000	70,074,000	274,490,000 ( 0)	7,258,010 (자체재원)
	관 급 비	42,634,990		42,634,990	42,634,990	0 ( 0)	0
보 상 비		-		-	-	( )	0
용 역 비		15,570,000		15,570,000		15,570,000 ( 0)	0

※ 용역비는 화곡고가내진보강공사 교통소통대책수립용역 시행 비용임

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 2018. 9. 11일 공사착공하여 교대측의 교량인상 및 받침교체는 완료한 상태임.

- 교각부 콘크리트브라켓은 비계 설치후 공사를 시행하여야 하나, 비계를 설치할 공간이 없어 공사시행이 불가한 실정으로,

- 교량하부의 차선변경 등 “교통소통대책 수립용역”(약 70일 소요)후 결과에 따라 본 공사가 진행됨에 따라 절대공기 부족으로 인한 사고이월 조치

- 용역시행 : 2018. 12. 11 ~ 2019. 2. 18

- 본공사 잔여공정 시행 : 2019. 2. 19 ~ 2019. 4. 30

첨부  <증빙서류 제출> 계약서, 지출원인행위 및 지출부 각1부(해당시).  끝.

화곡고가 내진보강공사 교통소통대책 수립용역

(교량안전과/강서도로사업소)

□ 사업개요

◦위치 : 양천구 신월동 455 ~ 강서구 화곡동 889

◦규모 : 화곡고가 교통대책 수립

◦기간 : 2018.12.11. ~ 2019.2.18(현재 공정율 5%)

◦총용역비 : 15,570천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 일반교량관리, 교량시설물내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비(도시개발특별회계 특별교부금)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '17이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		15,570,000	15,570,000	15,570,000	0	15,570,000 ( 0)	0
용 역 비		15,570,000	15,570,000	15,570,000	0	15,570,000 ( 0)	0
	도 급 비	15,570,000	15,570,000	15,570,000	0	15,570,000 ( 0)	0

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 화곡고가 내진보강공사

□ 사업기간 : 2018. 9. 11 ~ 2019. 4. 30

□ 예산과목 :

- 교량시설물내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비(도시개발특별회계 자체재원 54,833천원)

- 교량시설물내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비(도시개발특별회계 특별교부금 355,194천원)

□ 지출원인행위 미필사유

-

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계	-	-	-

확 인 자 :      직)  시설보수과장 성명) 박병연 (인)

조 사 자 :      직)       시설6급 성명) 강연홍 (인)