문서번호	도시철도설비부-11764
결재일자	2018.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	차량과장	도시철도설비부장
오금석	강치석	전결 12/14 代서태창

9호선 전동차 제작공장 출장결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12. 14.

도시기반시설본부

( 차 량 과 )

9호선 전동차 제작공장 출장 결과 보고

9호선 전동차 32량 및 24량 제작과 관련하여 제작공장내 제작 공정

관리 및 전동차 제작 품질등을 점검하고 보고드림

□ 출장 개요

- 개    요 : 9호선 전동차 제작공정 관리 및 차체 조립과정 점검 등

차체 조립과정에서의 제작품질 점검

- 출장장소 : 현대로템㈜(경남 창원시 의창구)

- 출장일시 : 2018. 12. 13(목) 08:00 ~ 21:00

- 출 장 자 : 차량과장, 장재순, 이재돈, 오금석, 양인석

□ 점검 방법

- 제작감독 전문기관인 케이알이앤씨(주)의 제작공정 진행의 적정성 여부

- 차량제작업체의 제작 계획대비 진행현황 확인

- 전동차 조립과정에서의 제작품질 적정성 파악

□ 점검 결과

- 9호선 전동차 24칸중 8칸은 제작완료되어 `18.12월중에 반입예정

- 잔여 16칸은 `19.2월 제작 완료하여 반입예정

□ 조치 사항

- 9호선 전동차 24량 제작에 대한 일정검토

· 제작공종 지연에 대한 검토의견 제작감독기관에서 보고 할 것

- 전동차 24량에 대한 반입일정이 `19년 2월말로 되어 있으나, 제작공종을 단축할 수 있도록 할 것

□ 기관별 지시사항

- 현대로템 : 전동차 24칸 반입예정일 단축을 위하여 제작 공종 계획을 단축할 것

- 케이알이앤씨(주) : 제작공종 지연에 대한 원인파악 및 제작공종 지연을 만회할 수 방법 검토 보고.    끝.

9호선 전동차 제작공장 점검 사진

사진설명 : 9호선 전동차 제작공장 점검 사진

사진설명 : 9호선 전동차 제작공장 점검 사진