문서번호	기전과-10971
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김윤재		김원일	12/14 최태용
협조
	관리단속과장		박대군

발광형 교통안전표지 설치 공사

설계변경(정산) 검토 보고

2018. 12.

북부도로사업소

(기 전 과)

발광형 교통안전표지 설치 공사

설계변경(정산) 검토 보고

발광형 교통안전표지 설치 공사 실정보고 및 작업완료에 따른 공사물량 변동에 따른 설계변경(정산)을 하고자 보고 드림

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 발광형 교통안전표지 설치 공사

□ 공사기간 : ‘18. 12. 4. ~ ’18. 12. 21.

□ 계약금액 : 금2,874,000원

□ 계 약 자 : **************

□ 설계변경 사유

□ 기존 설계는 신설이었으나 일반표지판이 설치되어 있음에 따른 물량 변동

□ 제경비(건강,연금,안전관리비,노인장기보험료) 정산

□ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공사원가	2,612,728	2,580,000	감 32,728
	부가가치세	261,272	258,000	감 3,272
	계	2,874,000	2,838,000	감 36,000

□ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 태양광 LED             교통안전표지 설치, 시설비

□ 조치계획

❍ 상기 보고 내용과 같이 공사물량에 맞춰 설계변경(정산)을 시행코자 함.

붙임 1. 설계변경서류 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약검증 확인서 1부.  끝.