“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰(준공기한 연기)

1. 도시관리과-12900호(2018. 12. 13.)와 관련입니다.

2. 『반포·서초·여의도 아파트지구 지구단위계획 수립 관련 교통영향평가 용역』과 관련하여 아래와 같이 변경계약을 요청  하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 반포·서초·여의도 아파트지구 지구단위계획 수립 관련 교통영향평가 용역

****************

다. 설계변경 내용 : 준공기한 연기(계약금액 변경없음)

연 번	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘18.03.07. ~ ‘18.12.24.	‘18.03.07. ~ ‘19.06.24.	6개월 연장

라. 변경사유 : 반포·서초·여의도 아파트지구 지구단위계획 수립 용역의 준공기한이 연장됨에 따라 해당 계획에 대한 교통영향평가 용역의 준공기한을 연장하고자함.

마. 예산과목 : 도시계획국 도시관리과, 도시관리의 질적수준제고, 환경개선 및 도시개발 관련사업, 반포·서초·여의도 아파트지구 지구단위계획 수립, 시설비

붙 임 1) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 준공기한 연기 방침서 1부.  끝.

	도시관리과장
주무관	박교관		주거지관리TF팀장	이경도		도시관리과장	12/14 임창수
협조자
시행	도시관리과-12951	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층 도시관리과	/
전화	(02)2133-8397	/전송	(02)2133-0738	/	urban927@seoul.go.kr	/	부분공개(5)