문서번호	안전치수과-20946		주무관			하수계획팀장			안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2018.12.14.
공개여부	비공개(5)
방침번호
			협조
방침번호

신대방동지구 침수방지 기본 및 실시설계용역

용역 실정보고

2018. 12.

안전치수과

신대방동지구 침수방지 기본 및 실시설계용역

용역 실정보고

신대방동지구 침수방지 기본 및 실시설계용역 시행중 실정보고 사항이 있어 아래와 같이 보고합니다

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 신대방동지구 침수방지 기본 및 실시설계용역

용역기간 : 2018. 6. 4. ~ 2018. 12. 31.

용 역 비 : 275,475천원

도 급 자 : ㈜화신엔지니어링 대표 최기영 외 1

Ⅱ		실정보고 내용

참여기술자 변경

분야별 참여기술자 퇴사로 인한 참여기술자 변경

분야	당초	변경	사유
상하수도	정창용	안용호	퇴사
	이유선	김광태	퇴사
	박용주	문상흠	퇴사
	이창훈	김희수	퇴사
	이세중	이훈희	퇴사
수자원개발	이인기	우기정	퇴사

⇒ 당초 사업수행능력평가 대상 외 분야별 참여기술자 변경사항이며, 당초 구성원과 동등한 자격을 갖춘 기술자임

과업대상 추가로 조사비용 등 설계변경

당초 풍수해저감종합계획(서울시 2016.8)에 따라 신대방동 내수재해위험지구 지선관로 개량을 통한 침수해소를 검토하였으나, 내수재해위험지구 지선관로 개량만으로는 침수해소 불가하여, 내수재해위험지구 외 상류부 등 추가 검토

과업물량 변경

구 분	당 초	변경	비 고
사업대상 물량	내수재해위험지구 1,964m	내수재해위험지구+상류부 등 3,903m

설계변경(증액) 사항

구 분		당초		변경		증감
		수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
합 계			36,846		81,371		44,525
1. 직접조사비			28,761		39,128		10,367
	측량조사	1.954km	7,888	3.903km	15,758	1.949km	7,870
	토질조사	4공	9,991	5공	12,488	1공	2,497
	줄파기조사	10공	10,881	10공	10,882	-	-
2. DB구축		1.954km	8,085	3.903km	16,149	1.949km	8,064
3. 침수시뮬레이션		-	-	1식	11,094	1식	11,094
4. 설계의 경제성(VE) 등 검토		-	-	1식	15,000	1식	15,000

⇒ 신대방동지구 침수방지를 위한 내실있는 용역 수행을 위하여 낙찰차액(44,525천원)을 활용하여 추가 과업을 시행하고자 함

설계물량 증가에 따른 준공기한 연기

준공기한 : 당초 2018. 12. 31. → 변경 2019. 5. 30.

연기사유 : 내수재해위험지구 외 개량 대상관로 증가로 과업기간 연장

⇒ 추가과업 및 설계경제성(VE) 검토 등을 위한 기간이 필요하나 공기가 부족하여 준공기한 연기 시행

Ⅲ		조치계획

내실있는 용역수행을 위하여 상기 내용과 같이 설계변경 및 준공기한 연기를 시행하고자 함

붙임 : 실정보고서 2부.  끝.