＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 계약의뢰(서울고교사거리~뱅뱅사거리간)

1. 우리사업소에서 시행하여 서울시설공단에 공사감독 위탁중인 『***********************』에 대하여 설계변경 심의를 마치고 아래와 같이 설계변경 시행 하고 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: ************************

나. 공사개요: 당초 D=200~700㎜, L=2,148m

변경 D=200~700㎜, L=2,178m(증 30m)

다. 설계변경사유:공종별 계약물량 증·감 및 신규공종 발생

라. 계 약 자: ********************************

마. 계약기간: 2018. 5. 15. ~ 2019. 1. 14.

바. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

노후 상수도관(송배수관) 정비 - 41101

사. 하자기간: 준공검사일로부터 3년

아. 변경금액                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	3,622,586,570	3,575,986,000	감 46,600,570
도 급 비	2,123,994,570	2,077,394,000	감 46,600,570
관 급 비	722,857,000	722,857,000	-
복구비및기타	775,735,000	775,735,000	-

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 관련서류 각 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강희창		시설관리과장	12/18 편병률
협조자
시행	시설관리과-23462	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)